기술용역 발주심의 요청서

안건번호	제 호
구 분	용역발주심의

건 명	노들섬 문화명소화 조성 기본 및 실시설계

요청기관명	서울시 도시재생본부(공공개발센터)
제출년월일	2016년 5월 일

기술용역사업계획

용역개요	○ 용 역 명 : 노들섬 문화명소화 조성 기본 및 실시설계 ○ 용 역 비 : 1,969백만원 ○ 용역기간 : 착공일로부터 8개월 ○ 사업규모 : 공연장 1,800㎡, 창작□창업지원시설 7,000㎡, 다목적시설 1,100㎡, 동서측 연결로, 광장 6,000㎡ 등 옥외공간 및 조경, 옹벽 보수□보강
용역의 필요성	○ 용역시행 목적 - 본 과업은 2015년 3월부터 시행된 ‘노들꿈섬 1·2차 공모’를 통하여 선정된 운영자의 운영계획 및 시설구상에 대한 구체적인 시설 조성을 위한 설계용역으로, 서울과 한강의 중심에 위치한 노들섬에 시민 모두가 즐길 수 있는 새로운 문화명소를 조성함과 동시에 한강의 경관 수준을 향상하는 것을 목적으로 한다. ○ 추진근거 - 노들섬 문화명소화 조성사업 추진 (2부시장 제41호, ′15.2.9) - 노들꿈섬 공모 및 민간위탁 시행계획 (도시재생본부장, ′15.6.8) ○ 투자심사 여부, 중기재정계획 등 상위계획 반영여부 - 2016. 5월 市 투자심사 완료 ○ 용역추진경위 - ′15.03.20. : 노들꿈섬 공모 운영위원회 구성 및 운영 - ′15.06.10. : 노들꿈섬 운영구상(1차) 공모 시행 - ′15.09.07. : 노들꿈섬 운영계획․시설구상(2차) 공모 시행 - ′16.02.29. : 노들꿈섬 공간□시설조성(3차) 국제설계 공모 시행 - ′16.05.19. : 투자심사절차 이행 (조건부) - ′16.06.20. : 노들꿈섬 공간□시설조성(3차) 공모 결과발표

과업내용 (요약)	○ 과업의 기본방향 - 음악을 매개로 한 문화 플랫폼으로 음악□문화예술□생태환경□친환경□상업□뉴미디어□개발모델 등 다양한 분야가 함께 협업하고, 시민 누구나가 언제든지 찾아올 수 있는 복합문화공간 조성 ○ 과업의 범위 및 주요 과업내용 - 과업 관련 각종 조사 및 자료수집, 계획업무 수행 - 공연장, 창작□창업지원시설 등 건축물의 기본 및 실시설계 - 동서측 연결로, 광장 등 옥외공간 조경 기본 및 실시설계 - 옹벽 등 기반시설 설치 및 보수에 대한 기본 및 실시설계
사업추진계획 (절차)	○ 국제현상설계 공모 : ′16.2월 ~ 5월 ○ 기본 및 실시설계 : ′16.7월 ~ 2월 ○ 공사시행 : ′17.3월 ~ ′18.2월
사업의 예상효과	○ 시민 공감대에 기반한 과정중심 도시재생 프로세스 첫 모델로서의 방향 제시 및 실효성 검증 ○ 노들섬의 활용성을 높여 다양한 시민들이 찾고 즐기는 문화명소로 자리매김

붙임 : 1. 사업 추진계획 1부.

2. 과업내용서 1부.

3. 설계공모지침서 1부.

4. 위치도 1부.  끝.