문서번호	시설과-3889
결재일자	2016.6.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설과장
협 조
	주무관
	주무관

서울대공원 기린나라 보수공사 준공정산 설계변경 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 6.

서울대공원

(시설과)

『서울대공원 기린나라 보수공사』

준공정산 설계변경 보고서

『서울대공원 기린나라 보수공사』와 관련하여 공종변경 및 물량 증감 사항에 대하여 준공정산 설계변경코자 함

1		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 서울대공원 기린나라 보수공사

□ 공사기간 : 2016. 6. 1 ~ 2016. 6. 20

□ 시 공 자 : 한일상사 대표 이 광 회

□ 도 급 비 : 금12,280,000원

□ 주요 공사내용

○ 3층 외부 천정 철골트러스 도장 243㎡

○ 내부벽체 균열부위 에폭시 충진 44m

2		변경사항 검토

□ 검토사항

(단위 :  천원)

구 분	현황 및 문제점	검 토 의 견	소요예산 (개략금액)
가설공사	∘ 강관틀비계 설치로 설계되었으나, 북서측 지반의 급경사 등 안전에 지장	∘ 지붕 끝부분 도장을 위해 비계 설치가 필요하나 급경사지에 설치할 경우 안전사고 발생이 우려되므로 고소작업차를 이용하여 작업하는 것이 적정할 것으로 판단	감 530
도 급 금 액			감 530

3		예 산 현 황

□ 사업비 변경

(단위 : 원)

사 업 명	금 액	계약금액	준공정산	비 고
서울대공원 기린나라 보수공사	도급금액	12,280,000	11,750,000	감 530,000

4		조 치 의 견

□ 위와 같이 준공정산 설계변경 처리코자 함

붙임 : 1.준공정산 내역서 1부. 끝.