문서번호	자원순환과-2247
결재일자	2014.2.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		자원회수시설팀장	자원순환과장
유영춘		정연구	02/12 최홍식
협조

마포자원회수시설

소각로 내화물 보수 외 6종 연간단가 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 2.

자원순환과

마포자원회수시설

소각로 내화물 보수 외 6종 연간단가 계획 보고

마포자원회수시설 소각설비의 원활한 운전을 위해 소각로 유지보수용 공사 연간단가 계약을 통해 투명성 및 안정성을 확보하고 예산을 절감하고자 연간단가 공사 계획을 보고드림

□ 근거

○ 마포자원회수시설 위․수탁운영 협약서 제10조(운영비용 집행) 제4호

- 단일사업으로 추정가격 3천만원 초과 용역 및 공사, 물품구매(2천만원)

○ 소각로 내화물 보수 연간단가계약 보고(마자운영 14-49, 2014.02.05.)

고압밸브 보수공사외 2건 연간단가계약 보고 (마자운영 14-48, 2014.02.05.)

□ 개 요

○ 소각시설 운전 중 긴급사항 발생시 신속한 보수 및 정비를 위한 분야별 연간단가계약

□ 운영사 승인 요청 내용

[소각로 내화물 보수]

○ 사업명 : 소각로 내화물 보수공사 (연간단가계약)

○ 공사개요 : 소각로 내부 벽체 및 내화물 부분 보수 등

○ 납품기간 : 계약일로부터 ~ 2015.02.28.

○ 소요예산 : 174,460천원

○ 공사내용

- 소각로 좌,우측 냉각공기 홀플랜트 교체(24개)

- 소각로 벽체부분 보수 (12㎡)

- 1,2,3호기 로터리킬른 아치부 보수(7.1㎡)

- 보일러 수관보호용 케스타블 부분 보수(60.5㎡)

- 쓰레기 투입구 내화물 부분 보수(12㎡)

[소각로 화격자 보수]

○ 사업명 : 소각로 화격자 보수정비 공사(연간단가계약)

○ 공사개요 : 화격자 및 거더 교체

○ 납품기간 : 계약일로부터 ~ 2015.02.28.

○ 소요예산 : 169,620천원

○ 공사내용

- 화격자 교체 및 이설 : 950개

- 화격자 지지대 프레임 교체 및 이설 : 133개

- 소각로 내 외부 잡철물 제작설치 1식

[배관 및 보온 보수정비]

○ 사 업 명 : 배관 및 보온 보수정비 공사(연간단가계약)

○ 공사개요 : 노후된 배관 및 밸브 교체

○ 납품기간 : 계약일로부터 ~ 2015.02.28.

○ 소요예산 : 117,590천원

○ 공사내용

- 배관 교체 및 보온 : 820m

- 밸브 교체 및 보온 : 176개

- 기타 잡철물 제작 설치 및 시험 등 1식

[펌프 및 송풍기 보수정비]

○ 사 업 명 : 펌프 및 송풍기 보수정비 공사(연간단가계약)

○ 공사개요 : 펌프 및 송풍기 주요부품 마모상태 점검 및 정비

○ 납품기간 : 계약일로부터 ~ 2015.02.28.

○ 소요예산 : 116,479천원

○ 공사내용

- 펌프 정비 : 130대

- 송풍기 정비 : 44대

[고압밸브 보수정비]

○ 사 업 명 : 고압밸브 보수정비 공사(연간단가계약)

○ 공사개요 : 고온·고압밸브 및 특수밸브 긴급 보수 정비

○ 납품기간 : 계약일로부터 ~ 2015.02.28.

○ 소요예산 : 120,208천원

○ 공사내용

- 고온 고압 밸브 정비 대상 : 58개

- 체크밸브 및 스팀트랩 정비 : 11개

- 컨트롤 밸브 정비 :18개

- 슈트블로워 정비 : 9개

- 기타 잡철물 제작 설치 1식

[폐기물크레인 보수 정비]

○ 사 업 명 : 폐기물크레인 보수정비 공사(연간단가계약)

○ 공사개요 : 소각로에 쓰레기를 투입하는 크레인 정기점검 및 정비

○ 납품기간 : 계약일로부터 ~ 2015.02.28.

○ 소요예산 : 150,084천원

○ 공사내용

- 권상, 주행, 횡행 정비 : 1대

- 쓰레기크레인 버켓 정비 : 2대

- 재크레인 버켓 정비 : 1대

- 와이어 로프 교체 : 6회

[모터 보수정비]

○ 사 업 명 : 모터 보수정비 공사(연간단가계약)

○ 공사개요 : 모터의 절연 보강 및 소모품 교체(총 모터수량 879대)

○ 납품기간 : 계약일로부터 ~ 2015.02.28.

○ 소요예산 : 98,571천원

○ 공사내용

- 모터 철거 및 분해 점검 설치 : 87대

□ 자체심사 결과

○ 심사 결과 : 감41,739천원(4.4%)

(단위 : 원)

사업명	요청금액	심사금액	절감액	조정율	주요 조정내용
소각로 내화물 보수 연간단가공사	174,460,000	164,021,000	10,433,000	5.9%	재료비 단가 조정
소각로 화격자 보수정비 연간단가공사	169,620,000	164,197,000	5,423,000	3.2%	재료비 단가, 노무비 공량 조정
배관 및 보온 보수정비 연간단가공사	117,590,000	111,210,000	6,380,000	5.4%	재료비 단가 조정
펌프 및 송풍기 보수정비 연간단가공사	116,479,000	112,255,000	4,224,000	3.6%	재료비 단가, 노무비 공량 조정
고압밸브 보수정비 연간단가공사	120,208,000	116,083,000	4,125,000	3.4%	재료비 단가, 노무비 공량 조정
폐기물크레인 보수정비 연간단가공사	150,084,000	142,802,000	7,282,000	4.8%	재료비 단가, 노무비 공량 조정
모터 보수정비 연간단가공사	98,571,000	94,699,000	3,872,000	3.9%	재료비 단가, 노무비 공량 조정
총 계	947,012,000	905,267,000	41,739,000	4.4%

□ 자체심사 주요내용

○ 소각로 내화물 보수 공사(연간단가)

- 내화물 단가 조정(계약심사 단가 적용)

○ 소각로 화격자 보수정비 공사(연간단가)

- PLATE/매 단가 조정(계약심사 단가 적용) : 527,512원  → 470,194원

- 설치공사 일위대가 공량조정

: 화격자 설치/톤당  - 2,132,797원 → 1,668,256원(비계공 3.10인 → 0인)

: 각종 잡철물 제작 설치/톤당 - 3,880,050원 → 3,280,642원(비계공 4.00인 → 0인)

: 잡철물 설치/톤당           - 950,263원   →   843,869원(비계공 0.71인 → 0인)

○ 배관 및 보온 보수정비공사 (연간단가)

- 플랜트배관 25A 수량 조정(225m → 175m)

- 방사선감사 정지액/kg 단가 조정(계약심사 단가 적용) : 27,500원  → 1,105원

○ 송풍기 및 펌프 보수정비 공사 (연간단가)

- 보일러 급수펌프 재료비 조정(견적서 단가 조정)

- 설치공사 일위대가 적용 직종 조정

: BOILER FEED PUMP 설치/대당 - 4,209,805원 → 2,861,118원

(플랜트기계설치공 → 기계설비공,  특별인부 → 보통인부)

○ 고압밸브 보수정비 연간단가공사

- 재료비 단가 조정(견적서 단가 조정)

- 설치공사 일위대가 공량조정

: 컨트롤밸브 분해 및 점검/대당 - 게이트 밸브의 120% → 게이트 밸브의 110%

: 슈트블로워 설치(이동식)/대당 - 673,362원 → 578,462원(플랜트용접공 0.5인 → 0인)

: 슈트블로워 설치(고정식)/대당 - 539,304원 → 444,404원(플랜트용접공 0.5인 → 0인)

○ 폐기물크레인 보수정비 연간단가공사

- 재료비 단가 조정(견적서 단가 및 계약심사 단가 적용)

- 설치공사 일위대가 공량조정

: OVER HEAD CRANE 설치/대당 - 1,125,787원 → 1,087,446원(용접공 0.297인 → 0인)

○ 모터 보수정비 연간단가공사

- 재료비 단가 조정(견적서 단가 조정)

- 설치공사 일위대가 공량조정

: 모터 철거 및 설치(110kw-10극)/대당 – 3,055,861원 → 2,070,780원(플랜트전공 5.39인 → 0인)

□ 추진 계획

○ 공사건수 : 7건

○ 소요예산 : 905,267천원

○ 입찰방법 : 일반경쟁입찰(G2B),

○ 입찰참가자격

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 같은법 시행규칙 제14조에 의한 자격을 갖춘자.

- 기타 운영사에서 정한 입찰참가 자격

- 2014. 2월 : 공사 발주

- 2014. 3월 ~ 2015. 2월 : 공사시행(부분준공 가능)

□ 행정사항

○ 운영사 승인통보

붙임 : 자체심사 내역 각  1부. 끝.