서울특별시 고시 제2016-    호

도시계획시설(문화시설) 실시계획 변경인가 고시

1. 서울특별시고시 제2008-247호(2008.7.24)로 도시계획시설(문화시설) 결정 및 지형도면 고시되고, 서울특별시고시 제2009-127호(2009.3.26)로 도시계획시설(문화시설)사업 시행자 지정 및 실시계획인가 고시되었으며, 서울특별시고시 제2010-77호(2010.3.4)로 도시관리계획(문화시설) 변경 결정 및 지형도면 고시되고, 서울특별시고시 제2015-328호(2015.10.22.)로 도시계획시설(문화시설) 사업 시행자 지정 및 실시계획 변경인가 고시된 서울특별시 용산구 이태원로 294 도시계획시설(문화시설)에 대하여,

2. 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』 제86조, 제88조 및 같은법 시행령 제96조, 제97조의 규정에 의거 도시계획시설(문화시설) 실시계획 변경인가하고, 같은법 제91조 및 같은법 시행령 제100조, 같은법 시행규칙 제14조의 규정에 의거 이를 고시합니다.

2016년 6월   일

서울특별시장

가. 결정(변경) 취지

◦ 사업시행자로부터 공사지연에 따른 사업준공 예정일 변경 요청

나. 사업시행지의 위치 : 서울특별시 용산구 이태원로 294

다. 사업의 종류 및 명칭

◦ 종  류 : 도시계획시설(문화시설)사업

◦ 명  칭 : 한남동 블루스퀘어 증축 및 대수선

라. 사업의 면적 또는 규모

시설명	시설의 세분	위치	연면적(㎡)	건폐율(%)	용적률(%)	높이 (m)	층수
문화시설	공연장	용산구 이태원로 294	30,250.17	54.59	72.73	17	지하4, 지상4

마. 사업 시행자의 성명 및 주소

◦ 성  명 : ㈜인터파크 씨어터 (대표이사 김양선)

◦ 소재지 : 서울특별시 용산구 이태원로 294

바. 사업의 착수예정일 : 실시계획 인가일로부터 30일 이내

사. 사업의 준공예정일

◦ 당 초 : 착수일로부터  4개월 이내

◦ 변 경 : 착수일로부터 14개월 이내

아. 기타 자세한 사항은 서울특별시(문화정책과, 02-2133-2534)로 문의하시기 바랍니다.