문서번호	주차계획과-8100
결재일자	2016.6.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주차시설팀장	주차계획과장
금종융		김종상	06/23 윤보영
협조

공덕동 주택가 공동주차장 건설 (마포구) 예산교부 검토

2016. 6.

도시교통본부

(주차계획과)

공덕동 주택가 공동주차장 건설 예산교부 검토

마포구에서 추진중인『공덕동 주택가 공동주차장 건설사업』관련 ‘16년 예산편성된 주차장 사업비(시비) 교부 요청함에 따른 검토결과 보고

Ⅰ. 사업개요

○ 위    치 : 마포 공덕동 7-134일대 (A=878㎡)

○ 규    모 : 지하1~지상5층(6단), 연면적 4,081㎡

- 주차장 : 83면 (지하1~지상2층,지상5층 6단 연면적 2,968㎡)

- 봉제지원센터 : 지상3~4층, 연면적 1,113㎡

○ 총사업비 : 10,497백만원

- 주차장 : 6,339백만원 (시비 3,170백만원, 구비 3,169백만원)

- 봉제지원센터 : 4,158백만원 (시비 4,158)

구 분	총사업비 (주차장)	투 자 계 획			비고
		‘15	‘16	‘17
계	6,339	1,591	2,758	1,990
시 비	3,170	-	1,777	1,393
구 비	3,169	1,591	981	597

○ 사업기간 : ‘15.1 ~ ‘17.12

Ⅱ. 추진현황(계획)

○ ’15.1.16 : 도시관리계획(시설:주차장) 결정(안) 방침

○ ’15.6.11 : 도시계획시설(주차장) 변경결정 및 지형도면 고시

○ ’15.6.25~7.9 : 도시계획시설(주차장) 사업 실시계획 인가 열람공고

○ ’15.7.16 : 도시계획시설(주차장) 사업 실시계획 인가 고시

○ ’15.7.27 : 공영주차장 건설 변경계획 수립(봉제지원센터 복합건립)

○ ’15.7.31~8.14 : 보상계획 열람공고

○ ’15.8.11~10.12 : 공덕동 봉제지원센터 및 공영주차장 건설 타당성조사 용역 시행

○ ’15.10.28 : 시 투자심사(적정)

○ ’16.2.26 : 토지보상 수용 재결(서토위)

○ ’16.4.15 : 토지 수용개시 및 공탁

○ ’16.3.28~8.24 : 기본 및 실시설계 용역 시행

○ ’16.8~9 : 건설공사 계약심사 및 건설사업관리(감리) 심의

○ ’16.9~10 : 건설공사 및 건설사업관리(감리) 용역 발주‧계약

○ ’16.10 : 기존 공덕1-2공영주차장 철거공사

○ ’16.10~’17.12	: 주차장 건설공사 발주 및 준공

Ⅲ. 세부 검토 내역

□ 공덕동 주택가 공동주차장 건설 예산 교부 요청

- 관련공문 : 2016년 주차장건설사업 시비보조금 배정요청

: 마포구 교통행정과-30760호 (‘16.6.22)

□ 주차장 분야별 사업비                           (단위: 백만원)

구 분		사업비	시 비	구 비	발주시기	비고
계		6,339	3,170	3,169
보상비	보 상	1,200	-	1,200	‘15.7~
설계용역	설계용역	366	-	366	‘16.3~8
공사발주	토목․건축	3,980	3,170	810	‘16.9~
	전 기
	소방․전기
	통 신
	기 계
감리비	시공감리	793	-	793	‘16.9~

□ 예산배정 검토(주차장건설)

○ 사업비 배정 현황(자치단체 자본보조, 단위: 백만원)

구 분	계	‘15년이전	‘16년			‘17년~	비고
			계	기배정	금회배정
계	6,339	1,591	2,758	981	1,777	1,990
시 비	3,170	-	1,777	-	1,777	1,393
구 비	3,169	1,591	981	981	-	597

□ 요청 사유

○ 기본 및 실시설계용역이 ‘16.8월 준공예정으로 건설공사 및 감리용역 계약에 따른 소요예산 확보 등에 따른 시비배정 요청

□ 검토 의견

○ 동 사업은 서울역고가 폐쇄에 따른 공덕동 봉제산업 지원을 위해 시정핵심과제(7017계획)에 포함된 조기집행 대상사업으로 현재 기본 및 실시설계용역 시행중으로 추진일정에 따라 사업은 정상적으로 추진중인 것으로 판단됨

○ ‘16 하반기 건설공사 발주에 필요한 시비 1,777백만원 요청하는 사항으로 사업이 원활하게 이루어질 수 있도록 예산배정함이 타당하다고 사료됨.

붙임: 1. 예산교부 요청공문 1부.   끝.