투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	토목부장
(경유)
제목	전기감리원 투입기간(추가)요청

1. 우리 본부에서 추진중인 「강남순환도시고속도로 4공구 건설공사」와 관련하여 공사기간 연장 및 금액변경으로 아래와 같이 전기감리원 투입기간 조정(추가)를 요청하오니 원활한 공사관리 및 고품질의 시공관리를 위하여 적극 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 투입기간 조정(추가투입) 요청기간

구분	당 초	변 경	비고(증)
전기감리원	‘15.03.02.~’16.06.19	‘15.03.02.~’16.07.31	42일

나. 공 사 명 : 강남순환도로 4공구 전기공사(2차)

다. 공사기간

- 총차 : 2010.05.25.~2019.11.30

- 금차 : 2015.02.24.~2016.07.15.  끝.

	설비부장
주무관			열빛총괄과장			설비부장
협조자
시행	설비부-9806	(	2016.6.22.	)	접수	토목부-12726	(	2016.6.22.	)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8604	/전송	02-3708-8659	/	yong9345@seoul.go.kr	/	대시민공개