문서번호	도시철도토목부-7864
결재일자	2016.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
안태현		代김용선	06/23 김진팔
협 조
	주무관			정삼기
	주무관			이경훈
	주무관			엄상민

『하남선(5호선연장) 1-1공구건설공사 건설폐기물처리용역(1차 2회)』

준공기한 연기 검토보고

2016. 06.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사 건설폐기물처리용역(1차 2회)』

준공기한 연기 검토보고

『하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사』로 발생하는 건설폐기물을 처리하기 위한 폐기물처리용역(1차)의 준공기한 연기사유 발생에 따라 검토보고 드림.

폐기물 처리 용역 현황

용 역 명 : 하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사 건설폐기물처리용역

계 약 자 : 대진환경산업㈜  대표 장인자

계약금액 : 금555,108,000원 (1차 : 금182,640,000원)

용역기간 : 총괄  2015.08.24 ~ 2019.03.28

1차  2015.08.24 ~ 2016.06.24

폐기물 처리용역 계약현황

구 분	용역비 (천원)	용역기간	수 량(TON)				비 고
			폐아스콘	폐콘크리트	건설폐기물	계
총괄분	555,108	`15.08.24 ~ `19.03.28	10,219	10,906	291	21,416
1차분	182,640	`15.08.24 ~ `16.06.24	3,420	3,808	-	7,228	진행중
장 래	372,468	~ `19.03.28	6,799	7,098	291	14,188

폐기물 용역(1차) 처리현황 및 공기 검토

1차 폐기물 처리 현황   (기준일 : 2016.06.21)

구 분	수 량(TON)			비 고
	계약수량	처리량	잔 량
폐아스콘	3,420	1,824	1,596
폐콘크리트	3,808	2,691	1,117
계	7,228	4,515	2,713

폐기물 처리용역기간 검토(1차)

- 하남선(1-1공구) 건설공사(1차) 줄파기 및 토공작업이 늦어져 폐기물(폐콘크리트, 폐아스콘) 처리 시기 미도래로 1차 폐기물 처리 용역의 잔여량을 준공기한(2016.06.24.) 내 처리하기가 어려울 것으로 판단됨.

책임건설사업관리기술자 검토의견

- 폐기물 처리가 원활히 될 수 있도록 폐기물 처리용역(1차) 기간을 연기함이 타당.

조치의견

책임건설사업관리기술자의 검토의견과 같이 현재 진행중인 폐기물 처리용역의 1차에 대해서 해당 공사의 건설폐기물 배출계획을 반영하여 용역기간을 변경하는 것이 적정할 것으로 판단되므로 준공기한을 아래와 같이 연기하고자 함.

1차 용역기간 변경

구 분	폐기물 처리 현황		1 차	비 고
당초	폐아스콘	3,420	2015.08.24 ~ 2016.06.24
	폐콘크리트	3,808
변경	폐아스콘	3,420	2015.08.24 ~ 2016.12.31	(190 일)
	폐콘크리트	3,808

따로붙임 : 1. 감리 검토의견서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.  끝