문서번호	기전과-4968
결재일자	2016.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	북부도로사업소장
백윤광		이영목	05/23 노영석
협 조
	주무관			박정민
	주무관			안종필
	주무관			민성준

『2016년 교통사고잦은곳개선 교통신호기공사(수유사거리외2개소)』

발 주 계 획 보 고

2016. 5

북부도로사업소

(기전과)

『2016년 교통사고잦은곳개선 교통신호기공사(수유사거리외2개소)』

발 주 계 획 보 고

관내 교차로 중 교통사고가 빈번히 발생하는 지점의 개선을 위하여 2016년 교통사업특별예산이 배정됨에 따라, 도로를 이용하는 운전자 및 보행인의 안전한 통행권 확보와 가로경관 조성을 위하여 발주 계획을 수립하여 보고함.

▢ 추진근거

❍ 보도상 지주형 가로시설물(신호등, 가로등) 통합관리계획

(행정2부시장 방침 제368호, 2014. 12. 1)

❍ 2016년 교통사고잦은곳 개선 사업추진을 위한 예산배정

(교통운영과-4348, 2016. 3. 10)

▢ 사업개요

❍ 사 업 명 : 교통사고잦은곳개선 교통신호기공사(수유사거리외2개소)

❍ 대    상 : 강북구 수유사거리외 2개소

❍ 사업기간 : 착공일로부터 ~ 2016. 9. 30.까지

❍ 공사개요 :

- 교통신호제어기 3대 교체

- 교통신호등주 11본 신설 및 철거

- 차량 ․ 보행등 ․ 잔여시간표시기 17조 신설 및 철거

- 기타 1식

❍ 공사금액                                               (단위 : 원)

구 분	총공사비	도급비	관급비	이전비	비고
금 액	153,760,000	101,930,000	27,390,000	24,440,000

❍ 예산과목 : 교통운영과, 도시교통체계및소통개선, 교통소통및안전관리강화, 교통사망사고줄이기사업, 시설비(401-01)

▢ 발주계획

❍ 계약방법 : 일반경쟁입찰(지역제한)

❍ 관련근거 : 지방자치단체로 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제20조 제1항 6호

- 입찰참가 자격 : 전기공사업을 등록한 업체로 입찰공고일 전일부터 입찰일까지 주된 영업소재지가 서울특별시에 소재한 업체

- 하자보수 기간 : 준공검사일로부터 1년간

▢ 추진일정

❍ 2016. 5   공사발주

❍ 2016. 6   공사계약 및 착공

❍ 2016. 9   공사준공

붙임 : 1. 설계서(공사설명서, 공사시방서, 설계내역서) 1부.

2. 청렴계약이행서약서 1부.  끝.