문서번호	설비부-10636
결재일자	2016.7.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
김두환		유병기	07/05 권오식
협 조

- 구리암사대교 건설 전기공사 -

가로등 유지관리비 조정 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 07.

도시기반시설본부

설비부

- 구리암사대교 건설 전기공사 -

가로등 유지관리비 조정 검토 보고

교량 및 도로 유지관리 부서 미확정에 따른 인수인계 지연으로 당초 가로등 유지관리에 소요되는 비용에 대한 책임건설사업기술자의 조정 검토가 있기에 보고 드림.
		ㅊ
	ㅊ

1		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 구리암사대교 건설 전기공사

□ 공사규모 : 가로등 설치×604본, 경관조명 설치×1식

□ 공사기간 : 총차 2010.07.28.~2016.08.31.

5차 2015.12.30.~2016.08.31.

□ 도 급 비 : 총차 금4,142,466,000원

5차 금72,593,000원

□ 계 약 자 : 모범전설(주) 대표 오세창

□ 감 리 자 : 도화엔지니어링 대표 오세항

2		당초 가로등 유지관리비 계약 내용

□ 준공시설물(가로등) 유지관리 세부 내용

○ 유지관리 사유

도로 및 교량 유지관리부서 미확정에 따른 도로부속시설물 인수인계 지연으로

유지관리부서 인계시점까지 가로등 유지관리(부점등수리, 점검 등)가 필요

하여 반영하였음.

○ 유지관리 규모

구 분	분전함	조명	비 고
도로조명	20면	579등	가로등
경관조명	4면	1,636등	교량

○ 유지관리 비용 : 금12,566천원

구 분	인원	단가	점검횟수	금액	비 고
내선전공	1명	131천원	61회	7,991천원	월/주5회
보통인부	1명	75천원	61회	4,575천원	월/주5회
합계				12,566천원

※참고 : ‘16.01.01 ~ ’16.03.31일까지의 당초 계약된 유지보수비 내용임.

3		가로등 유지관리비 조정 검토 내용

□ 조정 검토근거

○ 구리암사대교건설 전기공사 준공기한 연기에 따른 유지관리 기간 연장 검토보고 : 암사(감리)2016.124호(‘16.07.04)

□ 가로등 유지관리비 조정내용

○ ‘16.01.01일 부터~ 현재까지 가로등 점검을 실시한 결과, 주5회→주3회→주2회 단계별로 조정하여도 미인수인계 시설물 유지관리에 문제점이 없을 것으로 판단되어 점검 횟수를 아래와 같이 조정이 필요함.

○ 공사기간 연장에 따른 기간별 점검 조정내용

조정횟수	점검기간	점검횟수(회/월)	점검비용	비 고
당초	‘16.01.01~’16.02.14	27회(주5회/월)	5,562천원
1차 조정	‘16.02.15~’16.05.31	46회(주3회/월)	9,476천원
2차 조정	‘16.06.01~’16.08.31	26회(주2회/월)	7,606천원	예상비용포함 (7월~8월)

4		보고자 검토 의견

□ 가로등 유지관리비에 대한 책임건설사업기술자의 단계별 조정 검토 내용이 적정한 것으로 판단되므로 준공기한(인수인계 완료 시점)까지 추가 유지관리비를 반영하고자 하며 향후 점검내용에 대해서는 정산조치를 할 예정임.

○ 가로등 유지관리 변경내용

구분	변경전	변경후	증·감	비 고
유지관리비	12,566,000원	22,644,000원	증)10,078,000원	향후정산
유지관리기간	‘16.02.15 ~’16.03.31	‘16.01.01 ~‘16.08.31	증)5개월	공사기간 연장

따로붙임 : 책임건설사업기술자 검토의견서 1부. 끝.