문서번호	공원조성과-8757
결재일자	2016.7.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	공원디자인팀장	공원조성과장		푸른도시국장
송일섭	이영일	최현실		07/11 최광빈
협 조
	주무관		김대호

청소년 체험의 숲 조성

전문가 자문회의 개최 계획

2016. 7.

푸른도시국

(공원조성과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	성북구청
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

청소년 체험의 숲 조성

전문가 자문회의 개최 계획

1				사업개요

□ 사 업 명 : 청소년 체험의 숲 조성

□ 사업기간 : 2016 ~ 2017

□ 위    치 : 성북구 성북동 226-259번지 일대

□ 규    모 : 15,000㎡ (시설규모 2,000㎡)

□ 사 업 비 : 1,300백만원

□ 추진현황

❍ ’15. 1~3월 : 실시계획인가(2006.7월 : 공원조성계획(변경) 결정)

❍ ’15. 4~6월 : 보상계획공고 및 감정평가

❍ ’15. 7~‘16.7월 : 보상협의(소유권 이전)

❍ ‘16. 3월    : 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수

❍ ‘16. 5. 31  : 청소년 체험의 숲 검토보고회 개최(착수단계)

2				전문가 자문회의 계획

□ 일    시 : 2016. 7. 15.(금) 10:00 ~ 12:00

□ 장    소 : 사업현장 (성북구 성북동 226-259번지 일대)

□ 자문내용

❍ “청소년 체험의 숲 조성 용역” 설계 분야별 세부사항 검토 및 자문

❍ 지역 현황·특성을 살린 숲 체험장 조성계획 여부

❍ 문화재 보전 및 사업설계 방향 등 의견제시

□ 자문위원 구성 : 3명

❍ 청소년육성 분야 : 전성민(국립평창청소년수련원 원장)

❍ 모험시설 관리·운영 분야 : 박정욱(서울랜드 차장)

❍ 문화재(성곽) 분야 : 심정보(한밭대학교 교수)

□ 자문수당 지급

❍ 예산과목 : 생활권 공원확충, 노후공원 재조성, 청소년 체험의 숲 조성, 일반운영비, 사무관리비(100-201-01)

3				향후일정

❍ ’16. 8~9월 : 설계용역 최종보고, 문화재현상변경 및 건설기술심의,

운영방법 검토추진

❍ ‘16.10~11월 : 도시공원위원회 심의(공원조성계획 변경), 설계용역 완수, 공사계약심사 및 발주, 운영방법(공단, 민간위탁) 결정

❍ ‘16.11~’17.5월 : 공사시행

❍ ’17. 6월 : 시범운영 및 개장.

붙임 : 청소년 체험의 숲 조성 기본(안) 1부.  끝.