문서번호	시설보수과-2240
결재일자	2016.7.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
송민섭	김재봉	김일운	07/12 정흥순
협 조

- 2016년 1처리장 최초침전지 보수공사 -

준공기한 연기 보고

2016. 6

난지물재생센터

(시설보수과)

- 2016년 1처리장 최초침전지 보수공사 -

준공기한 연기 보고

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 2016년 제1처리장 최초침전지 보수공사

❍ 사업기간 : 2016. 4. 28 ~ 2016. 8. 22

❍ 사업위치 : 1처리장 최초침전지 1-6지, 2-2지, 2-8지, 3-1지

※ 공정율 : 1처리장 최초침전지 2-2지, 2-8지 보수 중(29%)

❍ 사업규모 : 단면복구보수 t=10mm 벽체 2,227㎡

t=20mm 벽체 1,669㎡

t=20mm 천정 514㎡

❍ 총사업비(도급액) : 761,156,000원

□ 보고내용

❍ 공사구간에 슬러지 수집기 교체공사 예정으로,

❍ 공정상 슬러지 수집기 교체공사가 먼저 완료된 후 보수공사가 착공 되어야만 하여 공사 착공이 늦어져 절대 공기가 부족으로 인한 준공기한 연기가 불가피한 실정임.

□ 조치의견

❍ 준공기한은 아래와 같이 연기하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

- 당 초 : 2016. 4. 28 ~ 2016. 8. 22

- 변 경 : 2016. 4. 28 ~ 2016. 11. 20

- 연기 귀책사유 : 난지물재생센터

- 지체상금 부과여부 : 미부과  끝.