문서번호	정수시설과-5219
결재일자	2016.7.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
박건수		이해승	07/12 이흥수
협 조

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

『관내 경계순찰로 시설공사 』

설계변경 심의 소위원회 개최결과 보고

2016. 07.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

『관내 경계순찰로 시설공사』

설계변경 심의 소위원회 개최결과 보고

우리 정수센터 『관내 경계순찰로 시설공사』에 따른 설계변경 사전 심의 소위원회를 개최하고 그 결과를 아래와 같이 보고함.

1		공사개요

공사명 : 관내 경계순찰로 시설공사

공사개요

- 토공사 및 다짐     - 목계단 설치 477개

- 야자매트 설치 501m

공사기간 : 2016. 5. 18. ~ 7. 16.

도 급 자 : (주)이우티이씨  대표 김 평

도 급 비 : 86,447,260원(당초) → 95,090,000원(변경)

2		심의위원회 개최 개요

개최일자 : 2016. 7. 12.(화)  11:00~11:30

개최장소 : 2층 회의실

심의내용 : 물량변경 및 보험료 정산 적정여부, 설계변경 내역 적정여부

참석위원 : 정수시설과장 이흥수 외 4명

3		개최결과 및 조치의견

설계변경 심의 소위원회를 개최하여 설계변경 적정여부에 대한 심의결과        심의위원 모두 적정의견을 제시하였음.

심의위원 모두 적정의견으로 설계변경 원안대로 공사를 진행코자하며          내역에 반영하여 설계변경 시행코자함. 또한 계약부서에 변경계약 의뢰.

붙임 : 설계변경 심의 소위원회 개최 의견서 1부.  끝.