투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 요청 (2016년 1처리장 최초침전지 보수공사)

1. 우리센터에서 시행하고 있는“2016년 1처리장 최초침전지 보수공사”에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2016년 1처리장 최초침전지 보수공사

나. 공사기간 : 2016. 4. 28 ~ 2016. 8. 22

다. 도 급 자 : 정반종합건설㈜ 대표 이정아

라. 연기사유 : 공사구간(1처리장 최초침전지 1-6지, 2-2지, 2-8지, 3-1지)내 슬러지 수집기 교체공사가 먼저 이루어져야 하므로,   이에 따라 공사를 해야 함에 따른 절대 공기 부족

마. 준공기한 연기요청 현황

- 당초 : 2016. 8. 22

- 변경 : 2016. 11. 20

첨부  : 준공기한 연기요청 의뢰서 1부.  끝.

								시설보수과장
주무관							송민섭				시설팀장					김재봉					시설보수과장					07/13 김일운
협조자
시행			시설보수과-2260										(						)		접수												(						)
우	10542					경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동)																/
전화									/전송								/														/	대시민공개