문서번호	시설관리과-19233
결재일자	2016.7.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
김재영		최재영	07/13 최명익
협조

급수공사 연기보고서

2016. 7

명에 의거 동대문구 관내 지역담당 업무 수행 중 공사기간 연기 사유가 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

□ 현 황

가. 공 사 명 : 2015년 제기동외 6개동 상수도공사

나. 도 급 자 : 수호건설 대표 문병순

□ 보고내용

○ 급수공사 작업지시 사항 중 아래와 같은 사항으로 부득이 현장 여건상 공사기한 연기가

필요한 실정임.

공 사 종 류	공사 위치	공사 개요	연 기 사 유	공 사 기 간
				당 초	변 경
신설 176번	장안동 349-15	신축급수공사	수요가와 신축공사일정 지연 협의로 연기코자 함	2016.06.28 ~2016.07.16	2016.06.28 ~2016.08.09
신설 179번	장안동 289-5	신축급수공사	수요가와 신축공사일정 지연 협의로 연기코자 함	2016.06.28 ~2016.07.16	2016.06.28 ~2016.08.09
신설 180번	장안동 382-5	신축급수공사	수요가와 신축공사일정 지연 협의로 연기코자 함	2016.06.28 ~2016.07.16	2016.06.28 ~2016.08.09
신설 181번	장안동 454-1	신축급수공사	수요가와 신축공사일정 지연 협의로 연기코자 함	2016.06.28 ~2016.07.16	2016.06.28 ~2016.08.09
개량 76번	장안동 237-32	개량공사	수요가와 내부공사일정 지연 협의로 연기코자 함	2016.06.28 ~2016.07.16	2016.06.28 ~2016.08.09
보온재 23, 24번	장안동 378-2 (413-5)	개량공사	수요가와 내부공사일정 지연 협의로 연기코자 함	2016.06.28 ~2016.07.16	2016.06.28 ~2016.08.09

□ 처리의견

○ 원활하고 안전한 급수공사 시행을 위해 공사기한을 연기하고 2016년 연간단가계약업체에       인계하여 민원 처리에 만전을 기하고자 합니다. 끝.