투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	세운상가 활성화를 위한 공공공간 조성공사(총차 및 1차 계약변경) 의뢰

1. 건축부-8742(2016. 7. 5.)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인 세운상가 활성화를 위한 공공공간 조성공사와 관련하여, 아래와 같이 계약변경(총차 및 1차)을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 세운상가 활성화를 위한 공공공간 조성공사

나. 계 약 자 : 성보건설산업(주) / (주)푸르미건설

다. 계약변경 내용                                               (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증감
총 차	18,682,346천원 (16.3.24∼17.6.23)	-	-
1 차	10,388,120천원 (16.3.24∼16.12.31)	7,100,000천원 (16.3.24∼16.12.31)	감3,288,120천원

라. 예산과목 : 도시재생본부 역사도심재생과, 지속가능한 역사문화도심 구현, 도심상가 활성화, 도심산업 활력촉매제, 세운상가군 재생사업,  시설비(401-01)

붙임  1. 계약변경(총차 및 1차) 검토보고서 1부.

2. 계약변경 의뢰서(총차 및 1차) 1부.

3. 총차 및 1차 공사변경 예정공정표 1부.

4. 총차 내역서 1부.

5. 1차(변경) 내역서 1부.

6. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	채종철		건축총괄과장	박범규		건축부장	07/13 김진용
협조자	지방시설사무관대우	신현성		주무관	김석기
시행	건축부-9147	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미엄 플레이스 빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2606	/전송	02-3708-2659	/	time@seoul.go.kr	/	부분공개(5)