				★선임주임			팀장	서울어린이대공원장	문화체육본부장
문서번호		서울어린이대공원-5073
보존기간		5년		협 조
결재일자		2016.06.29.
공개여부		공개
2016년 상반기 주요사업 추진현황 보고
			2016. 6
						서울어린이대공원

2016년 상반기 주요사업 추진현황 보고

□ 추진개요

핵심사업(5개/623백만원)		「노후 건축물 보수‧보강」,「이색 테마가든 조성」등
일반사업(7개/660백만원)		「공원 노후시설 정비」,「옥외전기실 울타리 및 캐노피설치」등

□ 추진현황(완료사업 7개, 정상추진 3개, 부진 2개)

○ 완료사업(7개/957백만원)

사업명	세부사업명	추진내용	사업비 (천원)
노후건축물 보수보강 (1~8월, 350백만원)	노후건축물 보수보강공사	꿈마루, 식물원(철골) 보수보강	325.578
	위험물 저장소(유류) 용도 폐기	꿈마루 유류탱크 청소 및 철거	2,200
	꿈마루 유해집비둘기 접근방지시설 설치공사	조류방지망 67.37㎡ 등 설치	7,238
	식물원 화장실 내부수선공사	화장실 내부(남,녀) 수선 28㎡	13,400
	소 계		348,416
공원 노후시설 정비 (1~12월, 97백만원)	노후시설 정비공사(연간단가)	긴급 노후시설(데크 등) 정비	46,002
	탄성포장 조달구매	동물원 탄성포장 450㎡	25,788
	풋살경기장 인조잔디 설치공사	인조잔디 설치 990㎡	16,360
	팔각당 지층 창호부분 차양 설치공사	팔각당 차양 10개소 설치	8,214
	소 계		96,364
옥외전기실 울타리 및 캐노피 설치 (1~4월, 60백만원)	옥외전기실 울타리 및 캐노피 설치공사	옥외전기실 4개소 울타리 설치 등	55,220
	부전기실 울타리 설치공사 폐기물 처리	부전기실 울타리 폐기물처리 1식	1,100
	소 계		56,320
하수관 준설 및 배수로 정비 (1~6월, 50백만원)	열린무대 제수변 정비 용역	상수도(100mm) 제수변 누수복구	2,959
	공사 실시설계용역	배수로 정비 등 4건 실시설계	9,880
	서울어린이대공원 하수관 정비공사	U형측구 철거, 이중벽관 설치 등	37,161
	소 계		50,000
후문 교통 재정비 (1~9월, 200백만원)	가로판매대 개선 디자인 설계용역	가로판매대 리모델링 실시설계	4,950
	가로판매대 개선 및 전력 인입공사	가로판매대 16개소 리모델링	73,020
	후문주변 교통 및 환경 정비공사	주차장 입구 동선 조정 등	80,953
	후문 배전선로, 가로등, 소화전 이설	배전선로, 가로등, 소화전 이설	27,557
	후문 주차라인 도색 및 차량 차단기 설치	경비실 차량차단기 교체 등	6,690
	후문 가로등용 LED 램프구매	가로등용 LED램프 45개	2,970
	소 계		196,140
이색 테마가든 조성 (1~9월, 80백만원)	테마정원 조성공사	커피 앤 티가든 조성	73,048
	소 계		73,048
공원 숲 복원 및 나지녹화 (1~11월, 120백만원)	수목생육 및 경관녹지 개선 실시설계	공사 실시설계	9,790
	정문 경관 및 가로수 생육개선 공사	보도블록 철거, 앉음벽 설치 등	77,848
	왕벚나무 외과수술공사	왕벚나무 15주 외과수술	9,200
	녹지대 멀칭용 바크 구매	바크 750포 구매	2,887
	소 계		99,725

○ 정상추진(3개)

사업명	추진사항	예정사항
어린이도서관 설립 용역 (1~12월, 100백만원)	서울도서관 분관 공원 유지 노력 어린이도서관 건립 기본계획 수립	어린이도서관 건립 타당성 조사용역 시행(7월 중)
어린이 놀권리 증진을 위한 바깥놀이 확충 (1~11월, 100백만원)	맘대로 놀이터 조성 기본 및 실시설계 꿈틀꿈틀 놀이터 놀이 프로그램 운영	모험의 나라 놀이터 철거 맘대로 놀이터 조성공사 시행
큰나무가 들려주는 이야기 교실(1~9월, 비예산)	큰나무 이름표 달기 자원봉사 운영 상반기 프로그램 운영(4월)	하반기 프로그램 운영(9월)

○ 부진사업(2개)

지속가능한 공원을 위한 자원순환 제고 (1~12월, 93백만원)		✓사업개요 : 동물 분뇨처리기 시설개선(1~7월), 낙엽풀장 3개소 조성(11~12월) ✓추진사항 : 市도시농업과 보조금 교부(5.16) 및 분뇨처리기 구매설치 발주(5.19) ✓부진사유 : 보조금 교부 지연 및 2회 유찰(단독응찰) ✓향후계획 : 일반수의계약으로 사업 신속추진 및 추진기한 연장(7월 → 11월)
동물원 사육업무 효율 및 관람편의 제공 (1~6월, 33백만원)		✓사업개요 : 펭귄사‧바다동물관 설비개선(1~2월), 코끼리사 중간문 설치(1~6월) ✓추진사항 : 펭귄사 모니터링 및 바다동물관 방송설비 설치 완료 코끼리사 방사장 중간문 실시설계 및 구매설치 발주(6.25) ✓부진사유 : 국내 사례 부재로 국외 사례연구, 내구성 및 정밀제작을 위한 설계검토 ✓향후계획 : 추진기한 연장(6월 → 10월)
			➡

□ 기타사항

○ 구축물(수탁) 재정조기집행 목표(782백만원) 초과달성(788백만원, 목표 대비 100.7%)

☞ 대상사업 : 노후 건축물 보수‧보강, 공원 노후시설 정비 등 7개 사업

○ 부진사업은 조기 완료할 수 있도록 공정관리 철저

【붙 임】완료사업 사진 1부.