투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신자	시설보수과장
(경유)
제 목	변경계약 체결 통보(2016년 제1처리장 최초침전지 보수공사-2차)

1. 시설보수과-2260(2016. 7. 13.)호와 관련입니다.

. 2. 귀과에서 의뢰한 『2016년 제1처리장 최초침전지 보수공사』건이 변경계약 체결 되였기에 알려드립니다.

가. 건    명 : 2016년 제1처리장 최초침전지 보수공사-2차

나. 당초계약체결일 : 2016. 04. 27

다. 변경계약체결일 : 2016. 07. 22

라. 계 약 업 체 : 정반종합건설(주) 대표 이정아

마. 계 약 금 액 : 금761,156,000원(금칠억육천일백일십오만육천원)

(변동없음)

바. 변경전 준공기한 : 2016. 08. 22

사. 변경후 준공기한 : 2016. 11. 20

아. 변 경 사 유 :

최초침전지 보수공사는 슬러지 수집기 교체공사(1처리장 최초침전지 1-6지, 2-2지, 2-8지, 3-1지)가 완료된후 보수공사를 해야 함에 따른 절대 공기 부족

붙임 : 1. 공사변경계약서 1부.

; 2. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	지두연		관리과장	윤석경		난지물재생센터소장	07/22 정흥순
협조자
시행	관리과-6791	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426	/
전화	02)300-8516	/전송	02)300-8518	/	nanji71@seoul.go.kr	/	부분공개(7)