문서번호	시설보수과-2991
결재일자	2016.8.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
최태석		박춘배	08/04 代박영종
협조

이문고가 하자보수 및 하자만료(포장공) 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 08.

성동도로사업소

(시설보수과)

이문고가 하자보수 및 하자만료(포장공) 점검결과 보고

2014년 준공된 ‘이문고가 보수.보강공사’의 하자보수 요청사항에 대하여 시공사의 조치결과 및 하자만료(포장공) 도래에 따른 점검결과 보고임

Ⅰ		공사 현황

공사명 : 이문고가 보수.보강공사

○ 공사규모 : 교면방수 및 재포장 78a, 교좌장치 교체 80개소,

난간정비 1,060m, 신축이음 교체 192m,

상판 치환 1,647㎡, 외부강선 보강 및 보수 12개소,

표면보수 11,481㎡, 단면보수 865㎡ 등

○ 공사기간 : 2013.03.20.~2014.07.31.

○ 시 공 사 : ***************

○ 하자담보책임기간 : 2014.08.14.~2017.08.13.(포장공은 2016.08.13.까지)

Ⅱ		하자보수 및 점검 관련근거

2013.06.04. : 준공시설물 하자관리 개선 방안 보고(행정2부시장 방침 제188호)

2016.05.31. : 2016년 정기(상반기) 하자검사 시행계획

2016.06.26. : 이문고가차도 누수개소 보수요청(한국철도공사)

2016.07.01. : 이문고가 하자보수 요청

2016.07.12. : 이문고가 하자보수 시공계획서 제출

2016.08.02. : 이문고가 하자요청에 따른 하자보수 조치결과 보고

Ⅲ		주요 하자보수 내역

교면포장부 포트홀 7개소

신축이음부 후타재 파손 2개소

유도배수관 조인트 누수(잦은 비로 8월 15일 완료예정 - 시공사)

Ⅳ		점검 결과

점검일시 : 2016.08.03. 13:00~17:00

점 검 자 : 시설보수과장 외 2인

점검결과 :

- 교면포장 하자보수 부실 및 하자 재발생(일부 망상균열 미보수)

- 신축이음부 후타재 보수완료

- 유도배수관 조인트 누수 : 미보수(시공사 보고사항)

Ⅴ		조치 계획

시공사에서 제출한 하자보수 조치결과에 대하여 현장을 확인한 바, 교면포장 손상부에 대한 보수 조치가 미흡하여 하자가 재발생한 상태이므로,

시공사로 하여금 교면포장 하자부분을 전면 재시공(보수)토록 조치하고, 추후 시공사의 하자보수 조치결과에 따라 교면포장 하자만료 점검을 종결처리하고자 함.

붙임  1. 관련 공문(하자보수 조치결과 보고) 1부.

2. 하자점검 현황사진 1부. 끝.