투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	변경계약 의뢰[2016년 교통신호등주 관급자재(1구역) 구매][수정]

1. 기전과-7276(2016.7.22)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 추진중인 2016년 교통신호등주 관급자재(1구역) 구매 계약건에 대하여 집행잔액 및 추가배정예산을 반영하여 설계변경을 시행하고자 변경계약 의뢰하오니  처리하여 주시기 바랍니다.

가. 사 업 명 : 2016년 교통신호등주 관급자재(1구역) 구매

나. 계약기간 : 2016. 4. 19 ~ 2016. 11. 30

다. 계약업체 : ㈜신한교통안전 대표 이 종 선

라. 계약금액 : 금131,705,140원

마. 설계변경 내용

❍ 계약금액 변경                                             (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
도급비	131,705,140	170,000,000	(증)38,294,860	-

❍ 설계변경 사유

- 1차~2차 자재 납품에 따른 계약금액 소진으로 추가 자재비 확보 필요

- 집행잔액 및 추가배정된 예산을 반영하여 설계변경 필요

바. 예산과목 : 교통운영과,도시교통체계및소통개선,교통안전시설물관리,

교통신호기신설및보수, 시설비 (금170,000,000원)

붙임 :  1. 설계변경 방침서 및 시행문 1부.

2. 설계변경 내역서(갑지) 1부.

3. 설계변경 내역서(교통신호등주 (1구역)) 1부.

4. 합의각서 1부.

5. [수정]별도발주 제외 사유서 1부.  끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
★주무관	백윤광		기전과장	07/25 이영목
협조자
시행	기전과-7331	(		)	접수		(		)
우	01137	강북구 한천로 913 (번동 365-1) 북부도로사업소	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-944-5473	/전송	02-945-5074	/	byk2011@seoul.go.kr	/	대시민공개