문서번호	교량보수과-453
결재일자	2014.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	교량보수과장	남부도로사업소장

공사 준공기한 연기 검토 보고

『노량교 교면포장 개량공사』

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  2.

남부도로사업소

(교량보수과)

공사 준공기한 연기 검토 보고

『노량교 교면포장 개량공사』

『노량교 교면포장 개량공사』 추진중 감독기관인 시설관리공단으로 부터 준공기한 연기 요청이 있어 이에 대한 검토 보고임

공사 현황

가. 공 사 명 : 노량교 교면포장 개량공사(장기계속)

나. 공사기간 : 2013.09.24 ~ 2016.09.22. [2013.09.24 ~ 2014.02.28(1차)]

다. 공 사 비 : 4,844,890,000원 [2,051,527,000원(1차)]

라. 공사개요 - 아스팔트 절삭 및 포장, 교면방수 : 419.94a [156.42a(1차)]

- 단면보수(초속경) : 205.03a [103.63a(1차)]

- 배수구(신설, 기존) : 236개소 [81개소(1차)]

마. 시공회사 : ㈜유진컨스트택 대표 이귀천, 홍용종합건설(주) 대표 이춘택

바. 감 독 청 : 서울특별시 시설관리공단

감독 실정보고 내용

상기 공사중 시공사가 제출한『준공기한(1차분) 연기요청』에 대한 검토 보고임

- 관련문서 : 준공기한(1차분) 연기요청 제출(유진컨스트택 2014-02호, 2014.02.12.)

준공기한(1차분) 연기 검토보고서(공사감독1처-1048호, 2014.02.12.)

가. 시공사 준공기한 연기 요청 내용

1) 준공기한 연기 사유

① 기상 상태에 따른 작업불가

구 분	내 용	일 수	비고
공 사 기 간	• 2013.9.24 ~ 2014.2.28(1차)	158
작업가능 일수	• 기상 양호 일수	33
작업불가 일수	• 강우일수 : 41일 • 최저기온 4℃미만 일수 : 84일	125

② 잔여 물량에 대한 예상 소요 작업일수 : 90일

2) 준공기한(1차분) 연기 요청일

- 당 초 : 2013. 09. 24 ~ 2014. 02. 28.

- 변 경 : 2013. 09. 24 ~ 2014. 05. 29 (증 90일)

나. 검토의견

1) 현공정률 : 42.2%

- 잔여공정 :  아스팔트포장, 교면방수, 배수시설

2) 본 공사는 올림픽도로 노량교 상의 포장공(교면방수, 단면보수 포함)이 주공정인 공사로서 기상상황에 따라 작업가능 여부가 결정되므로, 강우 및 최저기온 4℃미만 작업불가로 인하여 절대공기가 부족한 실정임

3) 상기와 같은 사유로 시공사가 요청한 잔여공정을 시공하기 위한 실작업일수(변경-예정공정표 참조)에 대한 준공기한 연기는 타당한 것으로 판단됨

다. 준공기한(1차분) 연기 내용

1) 준공기한(1차분) 연기 사유 :  절대공기 부족

2) 준공기한(1차분) 연기 내용

- 당 초 : 2013. 09. 24 ~ 2014. 02. 28.

- 변 경 : 2013. 09. 24 ~ 2014. 05. 29 (증 90일)

3) 연기사유 귀책 소재 : 발주청

4) 지체상금 부과 여부 : 미부과

검토의견

공사기간 중 기상상황에 따른 강우 및 동절기 기온강하(포장공사의 경우 4°C 이하 작업불가)로 인한 아스팔트포장 품질 향상을 위하여 절대공기 기한을 90일 연장 시행.

- 작업기간 변경

• 당  초 : 2013. 09. 24 ~ 2014. 02. 28

• 변  경 : 2013. 09. 24 ~ 2014. 05. 29(증 90일)

본공사 준공기한 연기에 따라 『노량교 교면포장개량공사 건설폐기물처리 용역』의 준공기한(2014. 2. 28)도 연기(2014. 5. 29)토록 병행 시행.

붙임 : 검토보고서, 예정공정표, 기상자료, 공문서 각 1부.  끝.