준공기한 연기의뢰서

1. 공사 현황

가. 공 사 명 : 노량교 교면포장 개량공사(1차)

나. 공사개요

- 아스팔트 절삭 및 포장, 교면방수 : 156.42a

- 단면보수(초속경) : 103.63a

- 배수구(신설, 기존) : 81개소

다. 공사기간 : 2013.09.24 ~ 2014.02.28

라. 공 사 비 : 일금 2,051,527천원

마. 계 약 자 : ㈜유진컨스트택 대표 이귀천, 홍용종합건설(주) 대표 이춘택

2. 상기 공사의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기

구 분	용 역 기 한	비 고
당 초	2013.09.24 ~ 2014.02.28
변 경	2012.09.24 ~ 2014.05.29	90일간 연장

나. 연기에 따른 귀책소재 : 서울특별시 남부도로사업소(교량보수과)

다. 지체상환금 부과여부 : 미 부과

라. 준공기한 연기사유 : 공사기간 중 기상상황에 따른 강우 및 동절기 기온강하(포장공사의 경우 4°C 이하 작업불가)로 인한 아스팔트포장 품질 향상을 위하여 절대공기   기한을 90일 연장 시행.

2014.  02.

작성자 : 지방시설주사   차 식 환 (인)

확인자 : 교량보수과장   문 춘 익 (인)

서울특별시 경리관 귀하