투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	공사 준공기한 연기요청 [노량교 교면포장 개량공사]

1. 우리사업소에서 시행하고 있는 『노량교 교면포장 개량공사』 의 준공기한을 아래와 같이 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 노량교 교면포장 개량공사 (1차)

나. 계 약 자 : ㈜유진컨스트택 대표 이귀천, 홍용종합건설(주) 대표 이춘택

다. 준공기한 변경

- 당  초 : 2013. 09. 24 ~ 2014. 02. 28.

- 변 경 : 2013. 09. 24 ~ 2014. 05. 29 (증 90일)

라. 연기사유

- 공사기간 중 기상상황에 따른 강우 및 동절기 기온강하(포장공사의 경우                 4°C 이하 작업불가)로 인한 아스팔트포장 품질 향상을 위하여 절대공기                기한을 90일 연장 시행.

마. 지체상환금 부과여부 : 미 부과

붙임 : 준공기한 연기의뢰서, 준공기한 연기보고서, 연기공문서 각 1부. 끝.

	교량보수과장
★주무관	차식환		교량보수과장	02/18 문춘익
협조자
시행	교량보수과-459	(		)	접수		(		)
우	150-070	서울 영등포구 도림로 145(대림동 711)	/
전화	02)3284-5436	/전송	02)3284-5404	/	csh1137@seoul.go.kr	/	대시민공개