함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서울물연구원
수신자	서울특별시상수도사업본부장(요금제도과장)
(경유)
제 목	물품 (정상)납품 지연에 따른 지연배상금 납부 고지서 발급 의뢰

1. 물순환연구과-5145(2016.8.2.)호와 관련입니다.

2.「하수슬러지감량화 파일롯장치 제작구매」계약 건에 대하여 계약상대자인 ㈜동일캔바스엔지니어링이 지연납품하였기에 지연기간에 대하여『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 제30조, 동법 시행령 제90조의 규정에 따라 지연배상금을 부과하고자 합니다.

가. 계약현황

- 계  약   명 : 하수슬러지감량화 파일롯장치 제작 구매

- 계 약 금 액 : 151,082,600원

- 계약 체결일 : 2016. 4.26

- 납 품 일 자 : 2016. 6.25

- 납 품 기 한 : 2016. 6.25

- 검사 완료일 : 2016. 7.29

나. 지연배상금 부과액 : ************

- 지연배상금 = 계약금액 × 지체일수 ×지연배상금률((1.5/1000)

= ****************************************

다. 납부방법 : 고지서 발급일로부터 10일

라. 예산과목 : 상수도사업수익, 영업외 수익, 기타영업외 수익.  끝.

붙 임 : 1. 관련 공문 및 계약서, 계약체결 통보서 각 1부.

2. 물품 검수 불가 통보 공문 1부.

3. 물품검수조서 1부.

4. 관련 법령 1부.  끝.

	서울물연구원장
주무관	이진숙		총무과장	08/09 이성철
협조자
시행	총무과-9873	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 천호대로 716-10	/
전화	02-3146-1829	/전송	02-3146-1836	/	jinsook79@seoul.go.kr	/	부분공개(5)