신월1 배수분구 하수관로 종합정비

팀  장 : 심 형 보(☎ 2133-3794)

담당자 : 신 중 선(☎ 2133-3795)

□ 사업부서 : 양천구 안전치수과

□ 사업개요

○ 위   치 : 서울특별시 양천구 신월5동 일원

○ 규   모 : 하수관거 굴착교체 D300~D1500mm, L=2.26km

○ 총사업비 : 3,699백만원 (공사비 : 3,421 , 폐기물 : 228)

○ 사업기간 : 2014. 3월 ~ 2015. 2월

□ 추진현황 및 향후계획

○ ′11. 03 ~ ′13. 3 : 실시설계용역 시행

○ ′13. 3 ~ ′14. 02 : 14년 사업계획에 반영

○ ′14. 02 ~ ′15. 02 : 공사 발주, 착공 및 준공

□ 예산배정계획

(단위 : 천원)

예산과목	소계	기배정액	배정요구액	배정잔액	산 출 내 역
소계	3,699,000	-	3,699,000	-
시설비 (공사비)	3,699,000	-	3,699,000	-	∘ 하수관 개량 2,260m×1,514천원=3,421,000 ∘ 기타 1식×228백만원=228,000

□ 배정사유

○ 노후 불량 하수관로를 정비하여 수해예방 및 하수악취 발생 해소

○ 원활한 배수체계 확립으로 쾌적한 도시환경 구축

○ 하수관로 정비에 필요한 사업비를 재배정하여 사업이 원활히 추진되도록 조치

□ 검토의견

○ 하수관로 정비에 필요한 사업비를 재배정하여 사업이 원활히 추진되도록 조치