문서번호	공원녹지정책과-13564
결재일자	2016.9.2.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

				시 민
주무관	공원협력팀장	공원녹지정책과장		푸른도시국장
윤석환	양성만	최윤종		09/02 최광빈
협 조	공원관리팀장		이용남
	공원문화팀장		조윤주

3단계 창의어린이놀이터 대상지 선정결과 보고

푸른도시국

[공원녹지정책과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

3단계 창의어린이놀이터 대상지 선정결과 보고

3단계 창의어린이놀이터 사업 추진과 관련하여 어린이놀이터 위원회 서면 및 현장 평가를 통해 대상지를 선정하고 그 결과를 보고 드림

□ 사업개요

○ 기    간 : ‘16. 6. ~ ‘17. 10.

○ 대    상 : 총 21개소(어린이공원, 마을마당 등 자치구 공공놀이터)

○ 소요예산 : 5,000백만원  ※ 자치구 특별교부금 활용

○ 조성내용 : 주민과 다양한 전문가가 협업하여 놀이 위주의 주민참여형 커뮤니터 놀이터로 재조성

○ 추진일정

▼
대상지 선정	➡	주민워크숍,디자인	➡	디자인심의(2~3회)	➡	설계심의(1~2회)
′16. 6.~ 8.		′16. 9.~ 10.		′16. 10.~ 11.		′16. 12.~′17. 1.

□ 추진경과

○ 3단계 창의어린놀이터 대상지 조사 : ‘16. 6. 10. ~ 6. 30

- 21개구 39개소 신청(시 ← 구)

○ 어린이놀이터 위원회 대상지 서면 평가 : ‘16. 8. 10. ~ 8. 12.

- 대상지 우선순위 평가 및 적성성 검토

○ 어린이놀이터 위원회 대상지 현장 평가 : ‘16. 8. 23. ~ 8. 24.

- 양천구 영도어린이공원 등 11개소

○ 어린이놀이터 위원회 대상지 선정 최종 회의 : ‘16. 8. 31.

- 16개구 21개소 선정

□ 선정결과

○ 선정놀이터 : 성동구 상원어린이공원 등 21개소

※ 【붙임 1】선정 대상지 목록 참조

○ 선정방법 : 어린이놀이터 위원회 심의·의결(서면 및 현장 평가)

○ 선정기준

- ｢어린이놀이터 운영협의체｣ 와 주민 참여형 디자인·설계 노력도

- ｢어린이 놀이터 함께 만들기 약속｣ 방향의 적합성

- 모래공간 조성 여부, 시설물 노후도, 주택밀집지역 등 사업효과가 높은 지역 등

□ 향후계획

○ ‘16. 9월초 : 3단계 대상지 선정 결과 통보 및 MA 매칭(시 → 구)

※ 설계비 사전 교부하여 커뮤니티 디자인 완성도 증진

○ ‘16. 9. ~ 10. : 2단계 사업평가 및 워크숍 실시

○ ‘16. 9. ~ 10. : 주민, 전문가와 함께 커뮤니티 디자인안 마련(자치구)

○ ‘16. 10. ~ ‘17. 1. : 디자인 심의 및 설계심의

※ 디자인(안) 확정 후 시장 보고 예정

붙임 : 1. 3단계 선정 대상지 목록 1부.

2. 어린이놀이터 위원회 대상지 최종 선정회의 결과 1부.  끝.