문서번호	조경과-631
결재일자	2016.1.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	조경시설팀장	조경과장	푸른도시국장

2016년 에코스쿨 조성사업 추진계획

2016. 1.

푸른도시국

(조 경 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	■	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	■	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016년 에코스쿨 조성사업 추진계획

도심 생활권내 고르게 분포하고 있는 학교에 다양한 녹화유형을 적용한 녹지와 생태공간을 조성하여 자연친화적 교육환경과 쾌적한 지역거점 녹지를 제공하고자 아래와 같이 “2016 에코스쿨 조성사업”을 추진하고자 함.

Ⅰ				추 진 근 거

서울특별시 도시녹화 등에 관한 조례 제8조(공공공익시설의 녹화기준 및 녹화계획)

시장 공약사업 『아토피 제로 서울 프로젝트-에코스쿨 80개소 조성』

‘서울, 꽃으로 피다’ 캠페인 추진계획(시장방침 제69호,’13.3.21.)

Ⅱ				추 진 목 표

자연학습장, 옥상·벽면녹화, 학교숲 조성 등 다양한 녹화 추진

학생들 스스로 녹화 및 도시농업 활동을 체험할 수 있는 토대 제공

학교공동체 참여유도 및 공동유지관리 체계 확립

Ⅲ				추 진 실 적

사업기간 : 2013년 ~ 2015년

대 상 지 : 81개교

규    모 : 60,220㎡

소요예산 : 9,053백만원(시비 8,893, 국비 160)

사업내용 : 자연학습장, 옥상녹화, 벽면녹화, 학교숲 조성 등

Ⅳ				2016년 사업계획

대 상 지 : 중구 남산초 등 67개교

규    모 : 49,789㎡

사업기관 : 중구 등 22개 자치구

사업내용 : 자연학습장, 옥상·벽면녹화, 학교숲 조성 등

사 업 비 : 8,692백만원(시비 8,492, 국비 200)

예산과목 : 조경과, 생활주변 녹지확충, 시민참여 녹지조성, 에코스쿨 조성, 자치단체 자본보조(403-01)

	<중점 추진사항>
	계획 단계 □ 에코스쿨추진위원회 구성 철저 - 학교공동체*와 지역 시의원 등 참여하여 구성 * 학생, 학교장, 교사 및 교직원, 운영위원회 등 학부모 - 사업취지와 학교측 의견 사전조율로 원활한 사업추진 유도 - 사업 전(全) 단계에 참여토록 학교여건에 맞는 역할 부여 실행 단계 □ 입체형 녹화 추진으로 생태·경관성 업그레이드 - 자연지반, 벽면, 인공지반 연계녹화 - 벽면녹화, 옥상녹화는 각 사업지침에 따라 추진 □ 학생들의 생태학습 및 도시농업체험 공간 조성 - 교재식물로 자연학습장 조성 - 먹거리식물로 텃밭, 키친가든 및 먹거리숲 조성 □ 다층식재를 통한 학교숲 조성으로 지역거점 녹지공간 제공 □ 빗물유입화단 및 빗물이용시설(빗물저금통 등) 적극 도입 이용/관리 단계 □ 공동유지 관리체계 마련, 관리수준 향상 ⇨ 협정서 체결 □ 학생들의 생태학습 및 체험프로그램 개발로 이용활성화 유도

추진일정

- 2016년  1월         : 사업계획 수립 및 시달

- 2016년  1월 ~  5월 :「에코스쿨추진위원회」구성, 사업설명회,

설계용역 및 설계심의 시행,

- 2016년  6월         : 계약심사 및 공사발주, 녹화협약 체결

- 2016년  7월 ~ 12월 : 공사시행

Ⅴ				행 정 사 항

실시설계 이전에 시 조경과 설계심의 요청

- 설계심의 요청시 시의회 소통결과 첨부

체계적인 유지관리체계 마련을 위한 녹화협약 체결 철저

공사 시 안내판 사전 설치 및 보행자 유도 등 안전조치 시행

착·준공시 5일 이내 보고

붙 임 1. 2013년 ~ 2015년 추진실적 1부.

2. 2016년 사업 대상지 현황 1부.

3. 에코스쿨 협약서(안) 1부.

4. 착공(준공)보고 서식 1부.  끝.