의원 요구 자료 제출

시 행	도로계획과-12869
결재일자	2016.9.7.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		민자사업팀장	도로계획과장	안전총괄관	안전총괄본부장	결재
최송천		정회원	하종현	이택근	09/07 김준기
협 조
	간선도로계획팀장				한정무

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 1289번, 김정태의원, 도시계획관리위원회)

따로붙임 :  시의원 요구자료 1부.  끝.

김정태의원(도시계획관리위원회, 더불어민주당)

요구번호 : 1289번

내    용 : 23. 남부순환로 관련(45.02)

□ 의원님께서 요구하신‘남부순환로 관련’사안에 대한 추진경위, 현황, 향후계획 등 관련 자료를 아래과 같이 제출합니다.

사업명

1) 강남순환도로

추진경위

및 현황

	< 사업개요 >
□ 사업기간 : ´97.~´18. □ 위 치 : 금천구 독산동 (소하JCT) ~ 강남구 일원동 (수서IC) □ 규 모 : 폭 6~8차로, 연장 22.9㎞ (민자구간 12.4㎞) □ 총사업비 : 총 2조 4,612억원 (시비 1조 5,514, 민자 9,098)

○ ´94.07.~´96.12. : 타당성조사

○ ´97.12.~´02.12. : 기본 및 실시설계

○ ´02.06.27.        : 민간투자사업 실시협약 체결

○ ´07.02.10.        : 민간투자사업 실시계획 승인

○ ´07.02.~         : 보상 및 공사 시행

○ ´16.07.03.        : 민자구간 개통

향후계획

○ ʹ18.07월 : 강남순환로 공사 전체완료(재정구간)

담당부서 및 담당자

○ 안전총괄본부, 도로계획과, 민자사업팀/간선도로계획팀

- 민자사업팀장 정회원(2133-8071), 담당자 김정식(2133-8073)

- 간선도로계획팀장 한정무(2133-8076), 담당자 백부현(2133-8077)

사업명

2) 서울제물포터널

추진경위

및 현황

	< 사업개요 >
□ 사업기간 : ´10.~´20. □ 위 치 : 양천구 신월동 (신월IC) ~ 영등포구 여의도동 (여의대로, 올림픽대로) □ 규 모 : 왕복 4차로, 연장 7.53㎞ (소형차 전용) □ 총사업비 : 4,546억원 (시비 793, 민자 3,753)

○ '07.07.27. : 민간제안서 제출

○ '09.02.02. : 사업제안서 타당성조사 완료(KDI)

○ '11.01.20. : 제3자 제안공고

○ '13.10.04. : 도시계획시설(도로) 결정고시

○ '13.11.15. : 민간투자사업심의위원회(기재부) 심의

○ '14.1.~3.  : 여의도 주민협의회 개최(5회)

○ '14.05.09. : 실시협약 체결 및 사업시행자 지정

○ '14.4.~10. : 여의도 주민대표 면담(4회)

○ '14.11.24. : 환경영향평가 공청회 / '14.12.05. 공청회 2차

○ '15.03.26. : 제6차 여의도 주민협의회 개최

○ '15.05.20. : 주민 간담회 및 전문가 자문회의 개최

○ '15.05.22. : 여의도 주민협의회 개최(7차)

○ '15.07.27. : 환경영향평가 협의 완료

○ '15.08.10. : 교통영향분석·개선대책 수립

○ '15.09.17. : 실시계획 승인 고시

○ '15.10.16. : 공사착공(공사기간 60개월)

향후계획

○ ʹ20.10월 : 서울제물포터널 공사 완료

담당부서 및 담당자

○ 안전총괄본부, 도로계획과, 민자사업팀

- 민자사업팀장 정회원(2133-8071), 담당자 최송천(2133-8072)

사업명

3) 서부간선지하도로

추진경위

및 현황

	< 사업개요 >
□ 사업기간 : ´10.~´21. □ 위 치 : 영등포구 양평동(성산대교 남단) ~ 금천구 독산동(금천IC) □ 규 모 : 왕복 4차로, 연장 10.33km(소형차 전용) □ 총사업비 : 5,200억원 (시비 1,380, 민자 3,820)

○ '07.12.20. : 민간제안서 제출

○ '08.12.08. : 사업제안서 타당성검토 완료(KDI)

○ '09.12.31. : 제3자 제안공고

○ '14.02.27. : 도시계획시설(도로) 결정 고시

○ '14.09.19~10.02 : 환경영향평가 공청회(구로,영등포,양천,금천구,광명시)

○ '14.12.18. : 민간투자사업심의위원회(기재부) 심의

○ '15.03.11. : 실시협약 체결 및 사업시행자 지정

○ '15.08.21. : 환경영향평가 협의 완료

○ '15.11.09. : 교통영향분석·개선대책 수립

○ '15.12.03. : 실시계획 승인 고시

○ '16.03.01. : 공사 착공(공사기간 60개월)

향후계획

○ ʹ21.02월 : 서부간선지하도로 공사 완료

담당부서 및 담당자

○ 안전총괄본부, 도로계획과, 민자사업팀

- 민자사업팀장 정회원(2133-8071), 담당자 김정식(2133-8073)

끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (도로계획과)	담당사무관	정 회 원 한 정 무
	☎2133-8072 ☎2133-8073 ☎2133-8077	주무관	최 송 천 김 정 식 백 부 현
	작 성 일 : 2016. 08. 31.