투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 변경요청(아스팔트콘크리트 외 1종)

1. 시설보수과-4548호(2016.6.2) 및 5980호(2016.7.18)와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인 『등촌지하차도 보수공사』에 소요되는 관급자재 구매 사항에 대하여 아래와 같이 납품기한을 변경하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 관급자재 구매(아스팔트콘크리트 외 1종)

나. 변경사유 :『건설폐기물 운반 및 처리용역』 계약취소에 따른

작업지연 및 절대공기 부족에 따른 납품기한 연기

다. 납품기한 변경 내역

품 명	물품 식별번호	규 격	단위	수량	납품기한
					당초	변경
아스팔트콘크리트	22535447	WC-4, t=20㎜, 가열, 3등급,표층용	ton	368	2016.9.20	2016.10.20
미끄럼방지포장재	21021752	세진로드,Roadcoat, t3.0㎜	㎡	380	2016.9.20	2016.10.20

라. 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 지하차도시설관리, 등촌지하차도보수, 시설비 및 부대비, 시설비.   끝.

	시설보수과장
주무관	유태용		시설보수과장	09/08 박병연
협조자
시행	시설보수과-7592	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7971	/전송	02-2657-7970	/	yty1703@seoul.go.kr	/	대시민공개