서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	지연배상금 부과

1. 우리시와 계약한 아래 건에 대하여 계약이행이 지체되어,“지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제90조(지연배상금)”에 따라 계약상대자에게 아래와 같이 지연배상금을 부과하고자 합니다.

가. 계약건명 : ********************************

나. 부과업체 현황

***************

*************************************

***********

************************

*************************

다. 지연배상금 : 금810,000원(금팔십일만원)

○ 산정내역:12,000,000원 × 27일 × 0.0025 = 810,000원

※ 계약금액 × 지체일수 × 지체상금률 = 지연배상금

○ 지체일수 산정내역

계약금액	준공기한	준공일자 (1차)	시정지시일 (A)	준공일자 (2차)	검사일자 (B)	지체일수 (C)=(B -A)
12백만원	2016.07.29	2016..07.29	2016.08.10	2016.08.31	2016.09.06	27

붙임 :  준공검사(감독)조서 1부.  끝.

★계약전문관							신충수			계약1팀장					조현					재무과장					09/12 서영관
협조자
시행			재무과-45444									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15															/			www.seoul.go.kr
전화		02-2133-3243						/전송			02-768-8880					/													/	부분공개(6)