문서번호	도시철도사업부-8773
결재일자	2016.9.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	신교통1과장	도시철도사업부장
이덕배	김종상	09/21 박동룡
협 조
	경전철2과장		최광무
	신교통2과장		이근봉

『신림선 도시철도건설 효율적 사업관리를 위한』

공사관계자 합동 공정회의 개최계획

2016. 09.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

『신림선 도시철도건설 효율적 사업관리를 위한』

공사관계자 합동 공정회의 개최계획

신림선 도시철도 건설사업 현장의 효율적인 관리와 원활한 사업추진을 위하여 공사관계자 합동 공정회의를 추진하고자 함

□ 관련근거

○ 실시협약 제23조(공정관리)

□ 추진방향

○ 현장 중심의 사업관리를 통한 건설사업의 효율적 공정관리 추진

○ 사업추진 현안사항 및 공정관리 검토

○ 공사관계자 의견청취 및 공사현장 현안사항 토론

○ 공정추진 및 민원발생, 주요 검토사항 논의

□ 공정회의 추진계획

○ 대상사업 : 신림선 1~3공구

○ 회의일시 : 매월 2회(둘째, 넷째 목요일 15:00~)

○ 회의장소 : 각 공구 현장사무실

- 10월 둘째주 : 신림선 2공구부터 공구별 오름차순으로 시행

○ 참석대상

- 주 무 관 청 : 도시철도사업부장, 담당과장, 공사관리관

- 사업시행자 : SPC 건설사업관리팀장, 설계사 담당PM

* 실시설계(구조물) 완료시까지 참석(설계 및 사업추진사항 공정관리)

- 감  리  사 : 책임감리원(감리1~4공구)

- 시  공  사 : 건설사업단장, 현장대리인(1~3공구)

○ 회의내용

- 공정보고 : 설계사 담당PM, 현장대리인(책임감리원)

· 설계사 담당PM : 실시설계 추진사항

· 현장대리인 : 공사현장 추진사항 및 현안사항

* 토공 및 가시설 작업시부터 책임감리원과 교차 보고

- 공정회의 주요내용

· 각 공구 공사추진 현황 및 주요 공종 시공사례

· 시민불편 최소화 대책 공유(주민홍보, 교통처리, 현수막, 배너 등)

· 주무관청, 사업시행자, 시공사, 감리사 상호간 협조사항

· 공정추진 및 민원발생 대책 등 주요 현안사항 해결방안

· 전 공정회의 지적사항 검토 반영여부 등

· 주무관청 행정적 지원 등 협조사항

【 10월 중 주요 공정 보고사항 】

○ 우선 착수구간 추진현황(유관기관 협의 및 지장물 이설계획)

○ 공사 현장 준비실태(하도급, 자재, 장비업체 선정 등)

○ 연도변 건물 조사(계측업체 선정 및 계측기 설치 등 계획)

○ 주민홍보계획(주민설명회, 지역신문, 각종 안내간판 설치계획 등)

○ 공사장 교통처리 및 가림막 설치계획

○ 기타 현안사항

□ 행정사항

○ 공정회의 개최계획 통보(참석대상자)

○ 회의자료 제출

- 작성기준 : 해당 보고일 전 주말 기준

- 제출기한 : 회의 개최 주 월요일까지 신교통1과 제출(772-7186)

○ 필요시 현장 합동점검 병행 실시.  끝.