문서번호	원수관리과-2244
결재일자	2016.9.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
지방공업사무관대우		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
정번석		손주옥	09/21 박기석
협 조
	전문관			김대용

위해관리계획서 및 공정안전보고서

작성용역 착수보고회 결과 보고

강북아리수정수센터

위해관리계획서 및 공정안전보고서 작성

용역 착수보고회 결과 보고

사고대비물질 위해관리계획서 및 유해・위험설비 공정안전보고서 작성 용역 착수 보고회를 개최하고, 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		회의개요

❍ 제  목 : 위해관리계획서 및 공정안전보고서 작성 용역 착수보고

❍ 일  시 : 2016. 9. 20.(화). 15:00~16:20

❍ 장  소 : 센터 소회의실

❍ 참석자 : 11명

- 내부(8) : 소장, 원수관리과장, 분야별 업무 담당자(가스, 전기, 소방, 기타)외 관련 직원 등

- 외부(3) : 용역업체 책임자 및 분야별 담당자

‣ 위해관리계획서 : 한국산업안전관리원(주) 고영석 차장

‣ 공정안전보고서 : 에스이솔루션(주) 전병두 대표이사

Ⅱ		회의내용

❍ 용역개요 : 통합취수장 사고대비물질(액화염소)에 대한 위해관리계획서와 유해・위험설비에 대한 공정안전보고서 작성, 환경부(화학물질안전원), 고용노동부(안전보건공단) 제출 및 승인

❍ 용역기간 : 2016. 9. 7. ~ 2017. 2.15.

❍ 주요내용

- 공정안전보고서 및 위해관리계획서 작성대상 등 관련법규

- 용역 세부작업내용, 추진계획 및 필요한 자료

- 용역 관련 질의 및 답변

❍ 위해관리계획서와 장외영향평가서 차이

- 장외영향평가서 : 화학안전원 제출시 컨설턴트 배석 가능

- 위해관리계획서 : 화학안전원 제출 시 컨설턴트 배석 불가

❍ 위해관리계획서 업무처리절차

- 사고대비물질 위해관리계획서 작성(보완·조정) ⇒화학물질안전원 제출(기존 및 신규자, 변경시, 매 5년 마다 제출)⇒화학물질안전원 검토⇒보완·조정요청⇒검토결과통보⇒현장확인(사실여부,준수여부,현장이행점검)⇒작성자 위해관리계획서 정보 주민고지

❍ 공정안전보고서 업무처리절차

- 사업장 설치·이전 변경 2부 안전보건공단 제출⇒심사·확인신청⇒ 안전보건공단에서 사업장에 확인요청(변경계획서 제출 및 재확인)⇒ 안전보건공단 서류보완·조건부 적정 통보⇒고용노동부 보고(안전보건공단), 소방서 등 관계기관 통보⇒고용노동부 이행상태점검, 평가 및 관리, 과태료 등 부과

- 심사 : 사업장 PSM 제출 후 최대 3개월

- 확인 : 안전보건공단 심사 후 3개월 이내

Ⅲ		추진일정

❍ ’16. 9. 7.  ~’16.11.30. : 공정안전보고서 자료수집 및 작성, 검토

❍ ’16.11.30. ~ ‘17. 2.15. : 안전보건공단 제출, 심사 및 보완

❍ ’16. 9. 7. ~’16.12.15. : 위해관리계획서 자료수집 및 작성, 검토

❍ ’16.12.15. ~ ‘17. 2.15. : 화학물질안전원 제출, 심사 및 보완

따로붙임  착수보고회 사진 1부.

착수보고회 사진

위해관리계획서 제도 및 용역 착수 보고	한국산업안전관리원(주) 질의 답변
공정안전보고서 제도 및 용역 착수 보고	에스이솔루션(주) 질의 답변