문서번호	대기환경연구부-13028
결재일자	2016.9.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	대기측정관리팀장	대기환경연구부장	서울특별시보건환경연구원장
이용민	代안미진	어수미	09/27 정권
협 조	주무관			노승근
	주무관			안미진

강북구 대기측정소 이전계획

2016. 9.

ㅓ

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

강북구 대기측정소 이전계획

강북구 번제1동-6136(2016.05.25.)호에 의거 강북구대기측정소가 위치하였던 번1동주민센터 건물이 재건축함에 따라 우이동주민센터로 이전하여 대기질 측정에 만전을 기고자 함.

1		관련근거

□ 강북구 번1동-6136(2016.05.25.)호 : 번1동청사 재건축 결정에 따른 옥상 대기관측소 이전 요청

대기환경연구부-6796(2016.05.27.)호 : 강북구대기오염측정소 이전 장소 확인 요청 통보

강북구 자치행정과-144867(2016.06.28.)호 : 강북구대기오염 측정소 이전 장소 확인 결과 통보

대기환경연구부-8433(2016.06.29.)호 : 강북구 대기오염측정소 이전후보지 평가계획

대기환경연구부-10105(2016.07.28.)호 : 강북구 대기오염측정소 이전후보지 비교측정 결과 보고

대기환경연구부-11654(2016.08.29.)호 : 강북구 대기측정소 이전후보지 평가단 운영 계획

대기환경연구부-12086(2016.09.05.)호 : 강북구대기측정소 이전후보지 평가회의 결과 보고

대기환경연구부-12152(2016.09.06)호 : 강북구 대기측정소 이전지 확정 알림

2		이전 설치지점

□ 이전개요

○ 번1동주민센터 -> 우이동주민센터

□ 우이동주민센터 개요

개소	위 치	건 물 명	층 수 (지상/옥탑)		준공년도	연면적(㎡)	구조
1	삼양로 139길 46길	우이동 주민센터	3층/옥탑 12m 옥상		1995	987	철근 콘크리트조
전경
동				서
남				북

3		이전 계획

□  이전일정(계획)

※ 위 일정은 상황에 따라 증감될 수 있음

일정	내용	비고
9.26～10.07	건물정밀안전점검
10.4～10.21	보강공사실시	안전점검결과후
10.4～10.21	방수공사
10.24～11.18	대기측정소 이전 설치
11.14～11.18	전기 및 통신선 단절 장비철거 및 이전	번1동 주민센터
11.14～11.30	장비설치 및 전기 및 통신선 연결	우이동 주민센터
11.14～11.30	장비 시운전 및 교정
12.1～	정상가동

4		예산 및 기타

□ 소요 예산 : 약 40,000,000원

- 정밀안전진단 : 3,850,000원

- 보강공사 : 10,000,000원

- 방수작업 : 3,000,000원

- 하우징제작 : 18,000,000원

- 전기설비비 : 3,000,000원

- 이전설치비 : 2,000,000원

□ 예산과목

- 대기환경개선 및 친환경교통차량보급, 자동차 배출가스 저감, 질소산화물저감 및 대기오염감시, 초미세먼지감축기반조성, 시설비(대기오염측정소 유지보수).

붙임 : 강북구대기측정소 이전후보지 평가회의 결과 보고.  1부.  끝.