문서번호	건축부-13254
결재일자	2016.9.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		환경시설과장		건축부장
김찬유		유현수		09/29 김진용
협 조
	새활용플라자개관추진팀장				하동준
	주무관				강철규
	주무관				곽용길
	주무관				이종근
	주무관				송석범

『재사용플라자 건립공사 건설사업관리용역』

계약변경(기간연장, 총차 및 3차) 검토 보고

2016. 9.

도시기반시설본부

(건 축 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

『재사용플라자 건립공사 건설사업관리용역』

계약변경(기간연장, 총차 및 3차) 검토 보고

「재사용플라자 건립공사 건설사업관리용역」과 관련 ㈜펨코엔지니어링으로부터 건축공사 공사기간 연장(60일)으로 인한 용역기간 연장(총차, 증 34일) 및 계약금액 변경(총차, 3차) 요청건에 대하여 검토 보고드림

1		공사개요

공 사 명 : 재사용플라자 건립공사

위    치 : 성동구 용답동 250-1외 4필지(중랑물재생센터 부지내)

규    모 : 지하2/지상5층, 연면적 16,529.57㎡

용    도 : 재활용시설(폐기물처리시설)

용역기간 : 2015. 1. 22 ~ 2017. 3. 21

건설사업관리용역사 : ㈜펨코엔지니어링건축사사무소, ㈜아이티엠코페레이션

건설사업관리용역비 : 2,170,976,000원(총차)

2		추진경위

‘15. 1.15 : 공사착공

‘15. 1.22 : 건설사업관리용역 착수

‘15.10.17 : 1차 건설사업관리용역 준공

‘16. 3.27 : 2차 건설사업관리용역 준공

‘16. 3.28 : 3차 건설사업관리용역 착수(’16.11.16한)

‘16. 6.22 : 공사 계약변경(공기연장, 총차 및 2차) 검토 보고(총차 60일 연장)

‘16. 7.22 : 건설사업관리기술자 배치계획 조정 요청사항 승인 통보(건축부→펨코)

‘16. 9.20 : 건설사업관리용역 계약변경 요청 (펨코엔지니어링건축사사무소)

- 총차 용역기간 34일 연장 및 총차 계약변경(증 78,174천원)

3		계약변경 사유

재사용플라자 건립공사 총차 공기연장(건축부-8009호,‘16. 6.22) 60일 연장에        따른 건설사업관리용역 기간 연장(증 34일) 및 계약변경(총차 및 3차)

4		용역기간 연장, 총차 및 3차 계약변경

구 분		변경전	변경후	증·감	비고
용역기간	총차	‘15. 1.22~’17. 3.21	‘15. 1.22~’17. 4.30	증 34일
	3차	‘16. 3.28~’16.11.16	‘16. 3.28~’16.11.16	변동없음
계약금액	총차	2,170,976,000	2,249,150,000	증 78,174,000
	3차	731,845,000	702,285,000	감 29,560,000	토목,조경 배치기간조정

(단위 : 원)

5		처리의견

공사기간이 ‘17. 1.14에서 ’17. 3.15으로 변경(증 60일 연장)에 따라 건설사업

관리용역을 총차 용역기간 연장(증 34일) 및 계약금액 변경(총차 증 78,174천원, 3차

감 29,560천원)하여 시행

건설사업관리용역 변경계약(기간연장, 총차 및 3차)에 대해 계약부서로 통보

- 예산과목 : 자원순환과, 효율적인폐기물처리, 생활폐기물재활용극대화, 서울재사용              플라자 조성, 시설비 및 부대비, 감리비

붙임 1. 재사용플라자 건립공사 건설사업관리용역 변경계약 요청 공문(펨코엔지니어링) 1부.

2. 산출내역서 및 배치표(변경전, 변경후) 1부. 끝.