문서번호	인력개발과-22814
결재일자	2016.10.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		복지노무팀장	인력개발과장
윤진석		김지형	10/07 유보화
협조

수안보연수원 키즈카페 개선계획 변경 검토보고

2016. 10.

행  정  국

(인력개발과)

수안보연수원 키즈카페 개선계획 변경 검토보고

수안보연수원 키즈카페 놀이기구 변경설치 요청에 따른 검토 보고임

□ 검토근거

❍ 수안보연수원 키즈카페 시설개선 (조건부) 승인 통지(인력개발과-19768,’16.9.1)

❍ 수안보연수원 키즈카페 개선관련 실정보고 제출(오브이룸스2016-73호,’16.10.4)

□ 검토내용

❍ 변경사유

- 키즈카페 놀이기구 중 어린이 안전사고가 발생된 롤러슬라이드에 대하여 향후 추가적인 안전사고를 미연에 방지하고자 철거 후 신규 놀이시설(경사오르기) 설치

※‘16.8.28. 이용 자녀 정강이 부위 긁힘/ ‘16.9.18. 이용자녀 롤러 사이끼어 손톱 빠짐

변경전(롤러슬라이드)	변경후(경사오르기) - 예시

❍ 변경내용

❍ 변경금액 – 연수원 초과수익금

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경 후	증 액	비 고
설 치 비	5,420,000	5,820,000	400,000	롤러슬라이드(△145,000)→ 경사오르기(500,000)

□ 검토결과

❍ 어린이 안전사고 예방을 위하여 연수원 변경계획대로 승인코자함.

붙 임 : 수안보연수원 요청 공문 1부.  끝.