문서번호	급수운영과-22063
결재일자	2016.10.10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

						시 민
주무관		급수운영과장		북부수도사업소장
최용진		이계환		10/10 박철규
협 조

공릉배수지(3,4지) 내부방식 공사

자재구매 계획보고

2016. 10.

북부수도사업소

[급수운영과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

공릉배수지 (3,4지) 내부방식 공사 자재구매 계획

우리사업소 관내 공릉배수지(3,4지) 내부방식 공사와 관련하여 소요 되는 자재를 아래와 같이 구매하여 방수방식 공사 시공에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□  상수도사업본부 시설관리과-9737호(2015.12.29.) : 상수도시설물 내부방식 공법선정 세부평가 및 기술심의 운영기준 개정(안)

Ⅱ		그간 추진 경위

□ 2016.02.22. : 배수지 내부방식 공사관련 자체 추진계획수립

□ 2016.03.08. : 배수지 내부방식 공사관련 부위별 계열공법 선정요청(본부)

□ 2016.03.28. : 시설물 유지관리『내부 검토회의』개최결과(본부)

□ 2016.04.08. : 사업추진 및 외부 기술심의위원회 개최계획 수립

□ 2016.05.09. : 사업추진 및 외부 기술심의위원회 개최결과 보고

□ 2016.06.10. : 내부방식공사계약 설계서 심사요청(본부)

□ 2016.06.28. : 내부방식공사 일상감사의뢰(본청 안전감사담당관)

□ 2016.07.08. : 공사계약의뢰(본청)

□ 2016.07.11. : 일상감사 의견서에 따른 조치결과보고(안전감사담당관)

□ 2016.08.24. : 공사계약체결(계약자 : ㈜당수산업개발 대표  한천수)

Ⅲ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 공릉배수지(3,4지)내부방식공사

□ 계약업체 : ㈜당수산업개발  대표  한 천 수

□ 계약금액 : ************************

□ 공사기간 : 2016년 8월 24일 ~ 12월30일

□ 공사내용 : 방수방식 및 표면처리 등(35,030㎡)

Ⅳ		공법(자재)선정 결과

시설물명	부위별	계열	단위	수량	선정업체
계				35,030㎡
공릉배수지(3지)	천장•기둥	도막	㎡	******	*******
	벽체•바닥	패널	㎡	******	******
공릉배수지(4지)	천장	도막	㎡	******	*******
	벽체•바닥•기둥	시트	㎡	*******	*********

※ 『2016년 배수지 내부 방식공사 공법(자재)선정 기술심의위원회 개최결과』

Ⅴ		향후 추진 일정

□ 2016년 배수지지 방수/방식 자재비 : ************

- 도막계열 : 조달제품 구매(소요예산 : **********

- 패널계열 : 조달제품 구매(소요예산 : ************

- 시트계열 : 사급제품 구매(소요예산 : ************

※ 자재 납품조건은 현장설치도 조건임

□ 2016.10월 중 : 도막, 패널계열 자재 조달구매의뢰(조달청)

□ 2016.12 중순 : 자재 납품완료(현장 설치도)

□ 2016.12.30. : 준공

붙임 : 1. 2016년 배수지 내부 방수방식공사 공법선정 기술심의위원회 개최결과

2. 관급자재 산출내역(도막) 1부.

3. 관급자재 산출내역(패널) 1부.

4. 관급자재 일위대가(도막)내역서 1부.

5. 관급자재 일위대가(패널)내역서 1부. 끝.