G밸리 종합발전계획 추진실적 검토회의 개최

’15.11월 수립한 “G밸리 종합발전계획(飛上 프로젝트 시즌2)”의 추진실적 및 향후 계획, 보완 필요사업 등에 대한 검토회의를 개최하고자 함

▢ 회의 개요

○ 회의 일시 : ’16.10.19(수) 10:00

○ 회의 장소 : 무교청사(더익스체인지서울빌딩) 7층 회의실

○ 참석 대상 : 산업거점조성반, 일자리정책과, 문화융합경제과, 조경과, 문화정책과, 청년정책담당관, 관광사업과, 관광정책과, 보육담당관, 주택정책과, 도기본 토목부, 도로계획과, 교통정책과, 도시철도공사 토목부, 대기관리과, SBA, 한국산업단지공단

○ 회의 내용 : G밸리 종합발전계획 추진실적 및 향후계획 보고, 보완 필요사업(쟁점) 검토

▢ 회의 진행계획

시 간	회 의 내 용	진 행
16:00~16:05(05´)	‣종합발전계획 추진실적 점검 개요 및 회의 진행방법 등 설명	산업거점조성반장
16:05~17:25(80´)	‣단위사업 추진실적 및 향후계획 발표(보완 필요사항 포함)	G밸리활성화팀장, 단위사업 담당 팀장
17:25~17:30( 5´)	‣정리말씀	창조경제기획관

붙임 1. 단위사업 추진실적 제출서식

2. 단위사업 추진실적 및 보완 필요사항(쟁점)

작 성 자	산업거점조성반장 : 김재진☎2133-4820 G밸리활성화팀장 :한정훈☎4822 담당 :홍기영☎4825

붙임 1 : 단위사업 추진실적 제출서식

단위 사업명

□ 사업개요

○ 사업내용(목적), 사업규모, 사업기간, 총사업비 등

□ 추진실적(10.10. 현재)

○

○

□ 추진상 문제점(보완 필요사항 포함)

○

○

□ 향후계획(보완 필요사항이 있는 경우 보완대책 포함)

○

○

□ 연차별 추진계획 및 소요예산(예시)

구 분		계	2016 실적	2017	2018	2018 이후
G밸리 근로자 문화복지센터 건립	추진계획		현상설계	실시설계 및 착공	공사	’20.7. 준공
	소요예산	0

※ ’17년도 소요예산은 배정요구액 기재(예산과 검토결과 수용 시 해당 예산 기재), 당초 계획(예산) 대비 축소되는 경우 사유 별도 기재

작성자	○○과장 : ◎◎◎☎2133-0000 ○○팀장 : △△△☎1234 담당 : ▽▽▽☎5678

붙임  : 단위사업 추진실적 및 보완 필요사항(쟁점)

분야	단위사업	소관 부서 (발표시간)	추진실적 및 보완 필요사항
산업 활성화 분야 15개 사업	창업보육 기능강화	산업거점 조성반 (3분)	▶ 추진실적 ‧ 舊정수장부지 개발과 연계, 창업보육센터, R&D센터 등 조성 추진 ‧ 산학연 R&D 사업화 2건 지원 중(’15~’18) ‧ G밸리 기업지원펀드 조성․운용(111억원) ‧ G밸리상품 수출상담회 개최(9.29~30)
	산학연 R&D 사업화 지원
	G밸리 기업지원 펀드 조성
	판로개척
	G밸리 수요맞춤형 인력양성	일자리정책 담당관 (3분)	▶ 보완 필요사항(쟁점) ‧ 기술교육원-G밸리 內 기업 간 교육훈련 협약 등 G밸리 연계 추진실적 없음 ‧ 보완대책 마련 필요(미추진 사유 포함)
	IoT 전문아카데미	서울산업진흥원 (8분)	▶ 추진실적 ‧ IoT 전문아카데미 : 상반기 18개사 수료 ‧ IoT 융복합컨퍼런스 :9.29. 개최예정 ‧ 비즈매칭 상담회 : 10월 중 개최예정 ‧ 산학연 과제 발굴연구회 : 14개 연구회(54개사) 선정, 지원 중 ․ IoT 시제품 10개사 제작 지원 ․ IoT 특화 R&D 지원 : 4개 과제 선정 및 1차 지원금 지급 ▶ 보완 필요사항(쟁점) ‧ IoT 지원관련, 신규 조성되는 ‘IoT 인큐베이션센터’와의 연계 방안 필요
	공공 IoT 해커톤
	IoT 융합컨퍼런스
	G밸리 비즈매칭 상담회
	산학연 과제 발굴 연구회
	IoT 시제품 제작지원
	IoT 특화 R&D 지원
	실증사업
	패션제품 판로개척	문화융합 경제과, 금천구청, 한국산업 단지공단 (3분)	▶ 보완 필요사항(쟁점) ‧ 새로운 패션센터 운영 계획(서남권 패선․봉제 업계 활성화)에 대해 산단공에서 변경 불가의견을 보여 사실상 운영 중단 ‧ 패션센터 기능 정상화 방안 마련 필요
	G밸리 패션센터 기능확대

분야	단위사업	소관 부서 (발표시간)	추진실적 및 보완 필요사업
녹지 및 문화공간 (프로그램) 확충 10개 사업	공개공지 쉼터 개선	조경과 (3분)	▶ 추진실적 ‧ 공개공지 4개소 조성 추진 중 ‧ 가로녹화 1개소 조성완료, 1개소 조성공사 중 ▶ 보완 필요사항(쟁점) ‧ 옥상녹화 사업은 민간에서 자부담을 기피하는 경향이 심해 추진실적 없음. 향루 공공시설에만 조성 예정 ‧ G밸리 內 녹지가 부족한 상황을 고려한 대안 마련 필요
	옥상녹화 텃밭 조성
	G밸리 가로녹화
	거리예술존 버스킹 공연	문화정책과 (3분)	▶ 추진실적 ‧ G밸리 비즈플라자에서 버스킹 17회 실시 ▶보완 필요사항(쟁점) ‧ G밸리 내 직장인 동아리 지원 신청 실적 없음. 문화프로그램 확충을 위한 대안 마련 필요.
	동아리 지원
	1단지 內 무중력지대 추가 설치	청년정책담당관 (3분)	▶ 보완 필요사항(쟁점) ‧ 타 지역과의 형평성, 공간 및 예산확보 곤란으로 추가설치 곤란 ‧ 추가설치 불가 時 기존 G밸리 內 무중력 지대 활성화 방안 수립 필요
	G밸리 관광상품 개발․운영 지원	관광사업과 (2분)	▶ 추진실적 ‧ ‘서울관광 추천코스’에 반영(산업화․창조길) ‧ 가이드북 제작․홍보 예정
	MICE 특화관광 프로그램 개발	관광정책과 (2분)	▶ 추진실적 ‧ G밸리 현장답사 (’16.7) 결과, 관광 요소 미흡 판단 ‧ 전기차 특화단지, 넷마블 박물관 등 조성 후 추진예정
	舊정수장부지 개발	한국산업단지공단 (5분)	▶ 추진실적 ‧ 舊정수장부지 개발 지원 MOU 체결(6월) 및 TFT 구성․운영(7월), 구조고도화사업 승인(9월) ‧ G밸리운동장 개발을 위한 설계 진행 중 (’16.3~ )이나 복합개발을 위해 설계중단 협의 중(市-금천구-산단공) ▶ 보완 필요사항(쟁점) ‧ 관계기관과의 협의를 통해 향후 운동장 개발방안 조속 마련 필요
	G밸리운동장

분야	단위사업	소관 부서 (발표시간)	추진실적 및 보완 필요사업
보육 및 주거기능 강화 5개 사업	국공립-직장 어린이집 확충	보육담당관 (3분)	▶ 보완 필요사항(쟁점) ‧ 적정부지 물색 중이나 참여사업장 부족으로 확충 곤란 ‧ 참여사업장 부족에 대한 보완대책 수립 필요
	고시원․모텔 매입, 리모 델링을 통한 주택공급	주택정책과 (3분)	▶ 보완 필요사항(쟁점) ‧ 사업자 참여 저조로 추진실적 없음 ‧ 대체 추진사업 발굴 필요
	원룸 및 다세태주택 매입, 자치구 맞춤형 주택공급
	토지임대부 사회주택 공급
	가산문화센터 복합 개발	산업거점 조성반 (2분)	▶ 추진실적 ‧ 현상설계공모 완료(9월), 기본 및 실시설계 계약 추진 중
G밸리 교통문제 근본적 개선 9개 사업	서부간선도로 지하화	도기본 토목부 (2분)	▶ 추진실적 ‧ ’16.3. 착공, 9월 현재 비상탈출구 수직구 가시설 및 굴착 공사 중 민원으로 일시 중단
	수출의 다리 램프 신설 및 철산교 확장	도로계획과 (3분)	▶ 추진실적 ‧ 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 추진 중( ’16.3~ )
	디지털3단지~두산길 간 지하차도 건설		▶ 추진실적 ‧ ‘토지보상 진행 중, ‘17.3. 착공 예정
	G밸리 교통종합개선 대책 수립	교통정책과 도철 토목부 (3분)	▶ 추진실적 ‧ G밸리 교통종합개선 대책 수립 용역 진행 중(9.8. 중간보고)
	7호선 가산디지털단지역 출입구 신설 및 확장		▶ 보완 필요사항(쟁점) ‧ ’16.3, 중기지방재정계획 미반영으로 투자심사 반려( ‘17.3. 투자심사 재의뢰 예정) ‧ 투자심사 통과 및 사업비 (141억원) 확보대책 필요

분야	단위사업	소관 부서 (발표시간)	추진실적 및 보완 필요사업
G밸리 교통문제 근본적 개선 9개 사업	전기차 셰어링	대기관리과 (4분)	▶ 추진실적 ‧ 전기차 30대 구매(2월) 및 시스템 구축 (5월), 전기차 20대 추가 투입 예정(9월) ‧ 전기차 충전시설 2개소 설치(9월) ‧ 공중전화 부스 충전기 2개소 개조(7월) ▶ 보완 필요사항(쟁점) ‧ 버스 성능 미흡으로 도입여부 불투명 ‧ 전기버스 도입은 舊정수장 부지 개발 관련 우리시 지원 방안에 포함된 내용임 ‧ 전기차 특화단지 조성을 위한 구체적인 보완계획 필요
	전기버스 도입
	충전단지 조성
	공중전화 부스 충전기 설치
제도정비 및 G밸리 브랜딩 추진 10개 사업	산업단지 실시계획 수립	산업거점 조성반 (5분)	▶ 추진실적 ‧ 기술심사타당성 심사(적정) 및 용역 공고 중(9.30.~10.21.)
	산업단지 내 기숙사 용적률 완화		▶ 추진실적 ‧ 조례개정(250%→400%) 완료(’16.3.)
	산업단지 활성화 지원 조례 개정		▶ 추진실적 ‧ ’16.9. 조례 개정안을 상정하였으나, 공청회 미개최를 이유로 보류 ‧ 공청회 개최 후 처리 예정
	산업단지 규제개선		▶ 추진실적 ‧ 규제개혁 전수조사( ’15.12~ ) ※ 취등록세 감면, 교통유발부담금 완화 제안
	노후산단 경쟁력 강화사업 응모		▶ 추진실적 ‧ ‘16. 혁신산단 선정계획이 9월에 발표 되어 응모여부 검토 중
	G밸리 청년홍보단 구성 및 市 보유매체 활용 홍보		▶ 추진실적 ‧ 청년홍보단 구성, 기업탐방 및 홍보 콘텐츠 생산(’16.8.~) ‧ G밸리 SNS(블로그, 페이스북, 인스타그램) 운영 ‧ 市 보유매체(내손안에 서울, 블로그 등)에 G밸리 홍보

분야	단위사업	소관 부서 (발표시간)	추진실적 및 보완 필요사업
제도정비 및 G밸리 브랜딩 추진 10개 사업	메인스트리트(상징가로) 조성	산업거점 조성반	▶ 추진실적 ‧ 용역 진행 중(’16.5. 업체선정)
	테마역 조성		▶ 추진실적 ‧ 금천구청에 예산 재배정(’16.5.) ▶보완 필요사항(쟁점) ‧ 가산디지털단지역 內 설치장소 선정 지연 ‧ 조속한(’16년 內) 사업 착수 필요
	언론사와 공동마케팅		▶ 추진실적 ‧ G밸리 Week 온라인 홍보(’16.9.20~) ‧ 기획기사(6회, 10월까지) 내용 협의 중