문서번호	토목부-20613
결재일자	2016.10.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		광역도로과장	토목부장
김상도		진재섭	10/10 김영수
협조
	토목총괄과장		이동훈

건설사업관리기술자 배치계획 변경 검토 보고

(사가정길(장안삼거리~전농동사거리)확장공사)

2016. 10.

도시기반시설본부

(토  목  부)

건설사업관리기술자 배치계획 변경 검토 보고

(사가정길 장안삼거리~전농동사거리 확장공사)

현장실정에 맞게 건설사업관리기술자의 투입기간을 조정, 배치하여 별도 용역비 반영없이 추진코자 검토 보고드림.

공사현황

○ 사 업 명 : 사가정길(장안삼거리~전농동사거리) 확장공사

○ 위    치 : 동대문구 장안동 555(장안삼거리)~전농동 32 (전농사거리)

○ 규    모 : 도로확장 폭5차로 → 6~7차로, 전체 1,200m중 520m

-  배봉사거리 구간 : 폭5차로  →  6~7차로, 연장390m

-  전농사거리 구간 : 폭5차로  →  6차로, 연장130m

○ 기    간 : 2016.2.29. ~ 2016. 12.31.

○ 사 업 비 : 7,960백만원 (도급비: 1,854백만원)

○ 시 공 사 : 고양종합건설(주), 감 리 사 :  ㈜삼안외 2

○ 공 정 율 : 65%, 장안동 구간 보도포장 중, 전농동 구간 한전주 이설중

실정보고

○ 책임건설사업기술자 현장실정에 맞게 배치 필요

- 건설사업관리용역 기간 변경

(당초) `16.03.21. ~ `16.11.17.(7.90개월)

(변경) `16.03.21. ~ `16.12.14.(8.77개월),증)0.87개월

- 건설사업관리기술자 투입기간 변경

분야	등급	투 입 기 간			비고
		당 초	변 경	증·(감)
토목	중급	‘16.05.28.~’16.11.09. (5.37개월)	‘16.05.28.~’16.12.14. (6.50개월)	증)1.13개월
토목	중급	‘16.3.21.~`16.11.17. (7.90개월)	‘16.03.21.~’16.12.14. (8.77개월)	증)0.87개월
조경	중급	‘16.05.01.~`16.05.31. ‘16.11.01.~`16.11.30. (2.00개월)	-	감)2.00개월

- 용역비 현황

용 역 명	용역비			비고
	당 초	변 경	증·(감)
장안교(구교)성능개선공사 외 1개소 건설사업관리용역	200백만원	200백만원	-

검토결과

○ 비용반영을 위한 책임건설사업관리기술자의 실정보고가 타당함으로 승인코자 함.

붙임 : 1. 책임건설사업관리기술자 검토의견서 1부.

2. 건설사업관리기술자 투입예정 공정표 1부.   끝.