서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	관급자재(아스콘) 수량 변경 요청

우리과에서 시행중인 「2016 가양대교 보수공사」구간내 추가 공사와 관련하여 소요되는 관급자재(아스콘) 수량 변경을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 관급자재(아스콘) 수량 변경 요청 내역

건 명	계약 번호	규 격	단위	수 량			수 량 변경사유	비 고
				당초	변경	증,감
내유동성 아스팔트 콘크리트 구매	2016063558600 (계약업체- (주)드림아스콘	WC-6,13mm, PG-76-22 1등급골재	톤	1,678	2,223	(증) 545	- 공사구간 추가 에 따른 물량 증가	계약금액 당초:134,961,869원 변경:183,221,869원 증) 48,260,000원

나. 예산과목

- 교량안전과, 교량관리, 고가차도 및입체교차로관리, 모래내고가보수공사, 시설비및부대비, 시설비 (추가 추산금액 : 32,173,000원)

- 교량안전과, 교량관리, 일반교량관리, 교량시설물 일상유지보수,시설비및부대비, 시설비 (추가 추산금액 : 16,087,000원).

붙임 : 관련 방침서 1부.   끝.

	교량안전과장
주무관	이기승		기술점검팀장	박영권		교량안전과장	10/11 박문희
협조자
시행	교량안전과-18437	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서울시청 서소문별관 1동2층	/
전화	02-2133-1980	/전송	02-2133-1429	/	con1970@seoul.go.kr	/	대시민공개