함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약 체결 보고[입상활성탄 재생시설 건설공사 지반조사 용역]

1. 계획설계과-9015(2016.10.17)호와 관련입니다.

2. 『입상활성탄 재생시설 건설공사 지반조사 용역』에 대한 변경계약을 아래와 같이 체결하고자 합니다.

가. 계 약 자 :************: 김규상

나. 용역내용 : 지반조사, 실내 토질시험, 내진설계 시험 등

다. 계약기간 : 2016.05.02. ∼2016.10.26.

라. 변경계약 현황 : 물량 변경                        (단위 : 원)

구 분	당 초		변 경		비 고
	용역기간	계약금액	용역기간	계약금액
계약기간	‘16.05.02.∼ ’16.10.26.	19,536,700	변경없음	변경없음	물량 변경

마. 변경사유 : 지반 조사 시 조사지층 심도 변경 등에 따른 수량 정산

붙임 : 1. 합의서 1부.

2. 변경계약 방침 보고서(부본부장) 1부.

3. 변경계약 방침 관련공문 1부.

4. 설계 내역서 1부. 끝.

주무관	김경식		재무회계과장	박병식		요금관리부장	10/18 代조두업
협조자
시행	재무회계과-15101	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1231	/전송	02-3146-1209	/		/	부분공개(7)