문서번호	배수과-6204
결재일자	2012.12.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	배수과장	급수부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
협 조
	경영관리부장
	기획예산과장
	급수설비과장
	급수계획과장
	시설과장

2013년 송.배수관 정비사업 계획

2012. 12.

상수도사업본부

급   수   부

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

‘13년 송.배수관정비 사업계획

누수 다발관로 및 적수발생의 원인이 되는 노후 송.배수관을 개량하고,

신도시, 재개발 등으로 인한 신규 급수 수요를 위한 공급관로 부설 등

‘13년 송.배수관정비 사업계획을 수립 추진하여 안정급수를 도모코자 함.

Ⅰ

사업 및 예산현황

구 분	총 계	기투자 (’96~2011)	2013년	2014년 이후
연 장(㎞)	560	514	38	8
사업비(억원)	8,100	7,293	700	107

Ⅱ

‘13년 예산 집행계획

□ 총  예  산 : 700억원

□ 집행계획

- 관 노후에 따른 누수다발  : 20건  36,810백만원

- 배수지건설 관련 수계전환 :  4건   5,160백만원

- 관로 이중화(비상관로)    :  5건  16,300백만원(올림픽대로 비상관로 포함)

- 신규사업(택지개발)       :  2건   3,350백만원

- 시설물 이설(중랑천)      :  1건   1,500백만원

계               :  32건  63,120백만원

- 간선배관비              :        4,000백만원

- 감리비                  :        1,850백만원

- 본부(포괄비)             :        1,030백만원

총 계             :       70,000백만원

Ⅲ

‘13년 사업 심사

□ 심사대상

- 노후된 강관, 회주철관 중 400㎜이상으로 적수 및 누수사고가 많은 관로정비

- 무단수 급수체계를 위한 이중화 및 순환배관망 구축사업

- 효과적인 배수지 운용 및 적정 체류시간 조정을 위한 급수체계 전환사업

- 신규 택지개발지역( 뉴타운, 재개발 등)의 급수를 위한 관로

- 시설물 이설( 중랑천 1650mm 노출관)

□ 심사결과

- 사업소 요청 : 53건  117,387백만원

- 선정결과    : 32건  70,000백만원

□ 사업소별 현황

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	급수부	기타
건수	32	4	4	6	5	1	2	5	3	2	-
연장 (km)	38.05	4.13	5.73	8.03	3.59	1.26	2.58	3.99	3.79	0.95	4
예산액 (백만원)	70,000	6,700	9,300	15,550	6,050	2,000	3,760	5,410	5,850	8,500	6,880

□ 시설물 이설공사(중랑천 1,650mm)는 본부 급수부에서 시행

- 설계 : 급수계획과

- 시행 : 시설과

Ⅳ

추진일정

□ 현장조사 설계(용역 1건 포함)       : ‘13.  1. ~ 3

□ 계약심사 및 발주                  : ‘13.  3. ~ 4

□ 계약 및 착공                     : ‘13.  4. ~ 5