문서번호	누수방지과-7866
보존기간	5년
결재일자	2009.11.11.
공개여부	공개
방침번호	부본부장 방침 제(709)호

★담당자		누수방지과장	시설관리부장	부본부장
협 조

2010년 배관정비사업 추진계획

2009. 11.

상수도사업본부

시 설 관 리 부

2010년 배관정비사업 추진계획

2010년 배관정비사업 조기정비 추진으로 ’10년 유수율 목표달성 및  수돗물 공급과정에서의 맑은 물 공급에 기여하기 위함

추진방향

◦ 관 내부 녹이 발생되고 있는 세척갱생관 및 무라이닝관 정비

◦ 내구연한이 경과되어 강도가 저하된 흑PE관 정비

◦ 사용하지 않는 불용관 적극 발굴정비

현  황

◦ 상수도관 총연장(’08년말 기준) : 13,943㎞

※ 송수관 : 588㎞, 배수관 : 9,870㎞, 급수관 : 3,485㎞

◦ 배관정비(350㎜ 이하) 현황

배급수관 교체실적 및 향후계획

구 분	교체대상	교체실적 (’84~’08)	향후계획
			계	’09년 (시행중)	’10년	’11년 이후	정비제외
연장(㎞)	13,108	12,346	762	76	61	548	77
사업비(억원)	23,898	19,110	4,788	468	384	3,936	(재개발지역)

- 노후 배급수관 교체 : 계획 12,337㎞(18,589억원)/ 실적 12,260㎞(목표대비 99.4%)

※ 재개발사업지역내 노후관 77㎞는 재개발사업 시행 시 철거예정

- 세척갱생관 교체    : 계획 628㎞(4,464억원)/ 실적 67㎞(목표대비 10.7%)

- 무라이닝관 교체    : 계획 82㎞(573억원)

- 흑PE관 교체       : 계획 61㎞(272억원)/ 실적 19㎞(목표대비 31.1%)

불용관 정비실적 및 향후계획

구 분	정비대상	정비실적 (’06~’08)	향후계획
			계	’09년 (시행중)	’10년	’11년
연장(㎞)	340	237	103	40	40	23
사업비(억원)	671	371	300	100	100	100

추진계획

◦ ’10년 배관정비사업 정비계획

사업계획 : 101㎞(배급수관정비 61㎞, 불용관정비 40㎞)

사 업 비 : 484억원(배급수관정비 384억원, 불용관정비 100억원)

사업소별 정비연장 및 사업비 배분

(단위 : ㎞, 백만원)

구분 사업소		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계		101	16.3	15.1	14.2	10.3	10.9	14.0	11.8	8.4
정비 연장	세척갱생관	28	5.6	3.5	4.3	2.5	3.1	3.3	2.6	3.1
	무라이닝관	23	3.6	3.1	5.1	1.6	1.9	2.6	3.6	1.5
	흑PE관	10	-	1.0	-	3.0	2.6	2.0	1.1	0.3
	불용관	40	7.1	7.5	4.8	3.2	3.3	6.1	4.5	3.5
계		46,182	8,188	5,929	7,285	4,689	4,810	5,627	6,042	3,612
사업비	세척갱생관	17,947	3,925	2,049	2,902	1,687	1,815	1,932	1,822	1,815
	무라이닝관	14,362	2,500	1,767	3,263	912	1,083	1,482	2,500	855
	흑PE관	4,600	-	458	-	1,368	1,183	910	550	131
	불용관	9,273	1,763	1,655	1,120	722	729	1,303	1,170	811

※ 사업비 중 감리비 2,194백만원, 부대비 24백만원은 미포함됨

◦ 우선 정비대상 선정기준

녹물 출수가 잦아 민원이 발생하는 구간

강도저하로 누수 발생이 잦은 구간

유관사업(하수도공사, 아스팔트덧씌우기공사 등) 구간

기타 정비가 필요한 구간

◦ 배관정비사업 추진계획 및 사업계획서 작성 : 따로붙임 참조

불용관정비를 제외한 전량 단위사업 발주 원칙

’88년 이전 매설된 PE관은 확인하여 흑PE관 전량 정비대상 포함

◦ 사업심사 계획

기간 : ’09.12.8 ~ 12.11(4일간)

장소 : 시설관리부

심사일정

사업소별	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
일시 및 시간	12.8 (10:00~ 14:00)	12.8 (14:00~ 17:00)	12.9 (10:00~ 14:00)	12.9 (14:00~ 17:00)	12.10 (10:00~ 14:00)	12.10 (14:00~ 17:00)	12.11 (10:00~ 14:00)	12.11 (14:00~ 17:00)

- 단위사업 계획서 2부 지참

행정사항

◦ 2010년 배관정비사업 추진계획을 별첨 보고서식에 의거 ’09.12.7일까지 보고바람