문서번호	누수방지과-8625
보존기간	5년
결재일자	2010.12.22.
공개여부	공개
방침번호	부본부장 방침 제(708)호

★주무관	누수방지과장	시설관리부장	부본부장

’11 배급수관 정비사업 추진계획

2010. 12.

상수도사업본부

시 설 관 리 부

발신명의를 입력하세요

’11 배급수관 정비사업 추진계획

2011년도 배급수관정비사업에 대한 사업소별 정비목표 설정, 설계심사 등을 실시하여 내실있게 사업을 추진하고자 함.

사업 개요

◦ 대 상 : 771㎞(D=80~350㎜ 공급 취약관)

- 세척갱생관 628㎞.  무라이닝관 82㎞.  흑 PE관 61㎞

◦ 사업기간 : 2006 ~ 2015

◦ 사업비 : 5,309억원

- 연차별 정비실적 및 정비계획

구 분		목 표	정비실적 (‘06~10)	연차별계획
				소계	‘11년	‘12년	‘13년	‘14년	‘15년
계	연장(㎞)	771	227	544	54	56	99	119	216
	사업비(억)	5,309	1,373	3,936	382.5	418	715	817.5	1,603
세척갱생관	연장(㎞)	628	134	494	37	41	90	110	216
	사업비(억)	4,464	879	3,585	250	300	650	782	1,603
무라리닝관	연장(㎞)	82	49	33	15	12	6
	사업비(억)	573	300	273	120	103	50
흑pe관	연장(㎞)	61	44	17	2	3	3	9
	사업비(억)	272	194	78	12.5	15	15	35.5

’11 추진 계획

◦ 정비대상 : 71㎞

- 세척갱생관 : 37㎞.  무라이닝관 : 15㎞.  흑PE관 : 2㎞.  불용관 17㎞

◦ 추진 내용

- 녹물 출수, 누수발생 등의 빈도가 높은 관 우선 정비

- 단절관 등을 순환 배관망이 형성되도록 연계 정비

- 배수관 시설 조사결과 정비를 요하는 부분 정비(중부. 서부. 강남. 강동)

- 기타 하수도공사, ASP덧씌우기 구간 등 정비가 필요한 구간 정비

◦ 추진 방법

- 사업발주는 단위사업 발주를 원칙으로 함 - 불용관 사업 제외

- ’88년 이전 매설한 PE관은 확인하여 흑 PE관 정비대상에 포함

◦ 사업기간 : ’11. 1. ~ 12.

◦ 사업비 : 448억원(배급수관정비 365억원. 불용관정비 83억원)

- ‘10년 대비 △13억원 (배급수관정비 369억원. 불용관정비 92억원)

- 사업소별 정비대상

구분 사업소		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계		71	12.8	10.7	11.0	6.6	6.8	8.7	7.7	6.7
정비 대상 (㎞)	세척갱생관	37	7.4	4.5	5.7	3.4	4.2	4.4	3.4	4.0
	무라이닝관	15	2.4	2.0	3.3	1.0	1.2	1.7	2.4	1.0
	흑PE관	2		1		0.8				0.2
	불용관	17	3	3.2	2	1.4	1.4	2.6	1.9	1.5
계		44,834	8,022	6,640	7,170	4,157	4,330	5,410	4,902	4,203
사업비 (억원)	세척갱생관	23,924	4,780	2,910	3,690	2,200	2,720	2,840	2,200	2,584
	무라이닝관	11,338	1,772	1,540	2,500	767	920	1,300	1,772	767
	흑PE관	1,250		630		500				120
	불용관	8,322	1,470	1,560	980	690	690	1,270	930	732

※ 사업비 중 감리비 2,389백만원, 부대비 27백만원은 미포함 됨

사업소 사업계획 심사

◦ 심사대상 : 세척갱생관, 무라이닝관, 흑PE관 정비사업

◦ 심사기간 : ’10. 12. 24. ~ 12. 29.(4일간)

- 사업소별 심사일정

사업소별	강동	강남	중부	서부	동부	북부	강서	남부
일시 및 시간	12.24 (10:00~ 14:00)	12.24 (14:00~ 17:00)	12.27 (10:00~ 14:00)	12.27 (14:00~ 17:00)	12.28 (10:00~ 14:00)	12.28 (14:00~ 17:00)	12.29 (10:00~ 14:00)	12.29 (14:00~ 17:00)

◦ 심사내용

- 단절관 및 관말지역 순환배관망 정비 선정여부

- 정비대상 선정의 적정여부

- 설계도서의 적정성

- 기타 사업계획의 적정성 등

◦ 심사장소 : 시설관리부 회의실

◦ 지 참 물

- 단위사업별 계획서 2부 : 구간별로 선정사유 상세히 기재 - 기 통보양식 참조(A3)

- 1/3000 GIS 도면(규격 A3)

▸ 재질, 구경, 부설연도 등 표시 - 오기된 내용은 수정

▸ 소블록 경계표시, 블록명 표기(적색)

▸ 재개발, 뉴타운 지역 표시(주황색)

▸ 정비대상은 GIS도면 위에 트레이싱지를 붙여 표시 및 관경표기(적색)

▸ 철거율이 75%이상 되도록 철거폐쇄 계획수립

행정사항

◦ 사업소별 2011년 배관정비사업 추진계획은 심사일별로 지참보고

◦ ‘15년까지 세척갱생관, 무라이닝관, 흑PE관에 대하여 사업소별 연차별 계획수립