문서번호	누수방지과-101702
보존기간
결재일자	2011.12.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	누수방지과장	시설관리부장	상수도사업본부부본부장
협 조

최고품질의 아리수 공급을 위한

2012년 배급수관 정비사업 추진계획

2011. 12.

상수도사업본부

(시설관리부)

’12 배급수관 정비사업 추진계획

’12년도 배급수관 정비사업에 대하여 사업소별로 정비목표를 정하고 사전 설계, 심사등을 실시하여 사업추진에 내실화를 기하고자 함.

사업 개요

◦ 대 상 : 771㎞(D=80~350㎜ 공급 취약관)

- 세척갱생관 628㎞.  무라이닝관 82㎞.  흑 PE관 61㎞

◦ 사업기간 : 2006 ~ 2015

◦ 사업비 : 5,309억원

- 연차별 정비실적 및 정비계획

구 분		목 표	정비실적 (’06~11)	연차별 계획
				소계	’12년	’13년	’14년	’15년
계	연장(㎞)	771	266	505	48	99	119	239
	사업비(억)	5,309	1,755.5	3,553.5	368	715	817.5	1,653
세척갱생관	연장(㎞)	628	156	472	27	96	110	239
	사업비(억)	4,464	1,129	3,335	200	700	782	1,653
무라리닝관	연장(㎞)	82	64	18	18
	사업비(억)	573	420	153	153
흑pe관	연장(㎞)	61	46	15	3	3	9
	사업비(억)	272	206.5	65.5	15	15	35.5

’12 추진 계획

◦ 정비대상 : 63㎞

- 세척갱생관 : 27㎞.  무라이닝관 : 18㎞.  흑PE관 : 3㎞.  불용관 15㎞

◦ 추진 내용

- 녹물 출수, 누수발생 등의 빈도가 높은 관 우선 정비

- 단절관 등을 순환 배관망이 형성되도록 연계 정비

- “배수관 시설 및 운영실태 조사용역” 결과 정비를 요하는 부분 공사 반영

▸ 대상사업소 : 중부. 서부. 강남. 강동

- 기타 하수도공사, ASP덧씌우기 구간 등 정비가 필요한 구간 정비

◦ 추진 방법

- 사업발주는 단위사업 발주를 원칙으로 함 - 불용관 사업 제외

- ’88년 이전 매설한 PE관은 확인하여 흑 PE관 정비대상에 포함

◦ 사업기간 : ’12. 1. ~ 11.

◦ 사업비 : 420억원(배급수관정비 348억원. 불용관정비 72억원)

- ‘11년 집행액 대비 증)69억원 (배급수관정비 268억원. 불용관정비 83억원)

※ ‘11년 예산액 대비 감)28억원 (배급수관정비 365억원. 불용관정비 83억원)

- 사업소별 정비대상

구분 사업소		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계		63	12.9	10.2	7.7	4.6	6.7	7.7	8.4	4.8
정비 대상 (㎞)	세척갱생관	27	5.3	3.2	4.4	2.4	3.0	3.2	2.6	2.9
	무라이닝관	15	4.6	2.5	1.5	0.9	2.4	1.5	4.0	0.6
	흑PE관	2	0.5	1.5				0.5	0.5
	불용관	15	2.5	3.0	1.8	1.3	1.3	2.5	1.3	1.3
계		42,046	8,905	6,424	5,178	3,017	4,639	4,883	5,898	3,102
사업비 (억원)	세척갱생관	18,894	3,761	2,228	3,110	1,671	2,088	2,229	1,811	1,996
	무라이닝관	14,462	3,695	2,009	1,205	723	1,928	1,205	3,214	483
	흑PE관	1,500	250	750				250	250
	불용관	7,190	1,199	1,437	863	623	623	1,199	623	623

※ 사업비 중 감리비 2,522백만원, 부대비 32백만원은 미포함 됨

사업소 사업계획 심사

◦ 심사대상 : 세척갱생관, 무라이닝관, 흑PE관 정비사업

◦ 심사기간 : ’11. 12. 13. ~ 12. 16.(4일간)

- 사업소별 심사일정

사업소별	강동	강남	중부	서부	동부	북부	강서	남부
일시 및 시간	12.13 (10:00~ 14:00)	12.13 (14:00~ 17:00)	12.14 (10:00~ 14:00)	12.14 (14:00~ 17:00)	12.15 (10:00~ 14:00)	12.15 (14:00~ 17:00)	12.16 (10:00~ 14:00)	12.16 (14:00~ 17:00)

◦ 심사내용

- 단절관 및 관말지역 순환배관망 정비 선정여부

- 정비대상 선정의 적정여부

- 설계도서의 적정성

- 기타 사업계획의 적정성 등

◦ 심사장소 : 시설관리부 회의실

◦ 지 참 물

- 단위사업별 계획서 2부 : 구간별로 선정사유 상세히 기재 - 기 통보양식 참조(A3)

- 1/3000 GIS 도면(규격 A3)

▸ 재질, 구경, 부설연도 등 표시 - 오기된 내용은 수정

▸ 소블록 경계표시, 블록명 표기(적색)

▸ 재개발, 뉴타운 지역 표시(주황색)

▸ 정비대상은 GIS도면 위에 트레이싱지를 붙여 표시 및 관경표기(적색)

▸ 철거율이 75%이상 되도록 철거폐쇄 계획수립

배급수관 정비 추진일정

1. 배급수관 정비사업 추진계획 수립(통보) : 2011. 12. 08

2. 사업소별 사업계획 심사 : 2011. 12. 13. ~ 12. 16.(4일)

3. 사업소별 사업계획 심사결과 및 설계도서 심사일정 통보 : 2011. 12. 23

4. 사업소별 설계도서 심사 : 2012. 01. 05. ~ 01. 10.(4일)

5. 설계도면 심사결과 사업소 통보 : 2012. 01. 16.

6. 예산배정(각 사업소별 일괄배정) : 2012. 01. 17.

7. 상수도분야 일위대가표 작성 심사완료 : 2012. 02. 10

- 일위대가표 작성 완료 : ’12. 01. 18.

- 일위대가표 심사결과 통보(기술심사담당관) : ’12. 02. 10.

8. 발주공사 계약심사 의뢰 : 2012. 02. 13. 까지

- 본청 계약심사 : 추정금액(도급+관급) 5억원 이상

- 본부 계약심사 : 추정금액(도급+관급) 5억원 미만

9. 계약심의(기간) : 2012. 02. 13. ~ 02. 23.

10. 공사 발주 : 2012. 02. 17. ~ 02. 27.

11. 도로굴착 승인(승인서 교부) : 2012. 03. 02. ~ 03. 05.

12. 공사계약 및 착공 : 2012. 03. 01. ~ 03. 15.

행정사항

◦ 사업소별 2012년 배관정비사업 추진계획은 심사일별로 지참보고

◦ ’15년까지 세척갱생관, 흑PE관에 대하여 사업소별 연차별 계획수립