문서번호	누수방지과-8004
결재일자	2012.12.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	누수방지과장	시설관리부장	상수도사업본부부본부장
협 조

'13년 배급수관 정비사업 추진계획

상수도사업본부

시 설 관 리 부

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

’13 배급수관 정비사업 추진계획

’13년도 배급수관 정비사업에 대하여 사업소별로 정비목표를 정하고 사전 설계, 심사등을 실시하여 사업추진에 내실화를 기하고자 함.

□ 사업개요

◦ 대    상 : 689㎞(D=80~350㎜ 공급 취약관)

- 세척갱생관 628㎞,  흑PE관 61㎞

◦ 사업기간 : 2006년 ~ 2015년

◦ 사 업 비 : 4,736억원

◦ 연차별 정비실적 및 정비계획

(단위 : ㎞.억원)

구 분		목 표	정비실적 (’06~12)	연차별 계획
				소계	’13년	’14년	’15년
계	연 장	689	232	457	30	184	243
	사업비	4,736	1,450.5	3,285.5	215.76	1,331	1,738.74
세척 갱생관	연 장	628	183	445	27	181	237
	사업비	4,464	1,229	3,235	200.76	1,316	1,718.24
흑pe관	연 장	61	49	12	3	3	6
	사업비	272	221.5	50.5	15	15	20.5

□ ’13년 추진 계획

◦ 정비대상 : 30㎞

- 세척갱생관 27㎞,  흑PE관 3㎞,  불용관 13㎞

◦ 추진 내용

- 녹물 출수, 누수발생 등의 빈도가 높은 관 우선 정비

- 단절관 등을 순환 배관망이 형성되도록 연계 정비

- 하수도공사, ASP덧씌우기 구간 등 정비가 필요한 구간 정비

- 고도정수 처리시설이 완료된 지역을 우선 정비

◦ 추진 방법

- 사업발주는 단위사업 발주를 원칙으로 함 - 불용관 사업 제외

- ’88년 이전 매설한 PE관은 확인하여 흑 PE관 정비대상에 포함

◦ 사업기간 : ’13. 1. ~ 11.

◦ 사 업 비 : 295.76억원(감리비 및 부대비 포함)

- 배급수관정비 : 215.76억원

- 불용관정비 : 80억원

- 사업소별 정비대상

구분 사업소		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계		43	8.5	8.0	5.8	3.5	3.9	6.3	2.9	4.1
정비 대상 (㎞)	세척갱생관	27	5.3	3.2	4.5	2.5	3.0	3.2	2.5	2.8
	흑PE관	3	0.7	1.5	-	-	-	0.8	-	-
	불용관	13	2.5	3.3	1.3	1.0	0.9	2.3	0.4	1.3
계		27,906	5,505	4,891	3,911	2,280	2,653	3,961	1,994	2,711
사업비 (백만원)	세척갱생관	18,996	3,730	2,260	3,170	1,710	2,140	2,250	1,766	1,970
	흑PE관	1,500	350	750	-	-	-	400	-	-
	불용관	7,410	1,425	1,881	741	570	513	1,311	228	741

※ 사업비 중 감리비 1,650백만원, 부대비 20백만원은 미포함 됨

□ 사업소 사업계획 심사

◦ 심사대상 : 세척갱생관, 흑PE관 정비사업

◦ 심사기간 : ’12. 12. 21. ~ 12. 27

◦ 심사내용

- 단절관 및 관말지역 순환배관망 정비 선정여부

- 정비대상 선정의 적정여부

- 기타 사업계획의 적정성 등

◦ 심사방법 : 사업소의 정비계획을 서면 심사

◦ 사업계획서 심사 자료

- 단위사업별 계획서 2부 : 구간별로 선정사유 상세히 기재

- 1/3000 GIS 도면(규격 A3)

▸ 재질, 구경, 부설연도 등 표시 - 오기된 내용은 수정

▸ 소블록 경계표시, 블록명 표기(적색)

▸ 재개발, 뉴타운 지역 표시(주황색)

▸ 정비대상은 GIS도면 위에 트레이싱지를 붙여 표시 및 관경표기(적색)

▸ 철거율이 75%이상 되도록 철거폐쇄 계획수립

□ 배급수관 정비 추진일정

◦ 배급수관 정비사업 추진계획 수립(통보) : ’12. 12. 14

◦ 사업소별 사업계획 심사결과 및 설계도서 심사일정 통보 : ’12. 12. 28

◦ 예산배정(각 사업소별 일괄배정) : ’13. 01. 21

◦ 일위대가표 작성 완료 : ’13. 01. 25

◦ 공사계약심의 기간 : ’13. 02. 08. ~ 02. 25

◦ 공사 발주 및 착공 : ’13. 02. 18. ~ 03. 15

□ 행정사항

◦ 각 사업소에서는 ’13년 배관정비사업 추진계획을 ’12.12.20일 까지 보고