문서번호	배수과-2524
보존기간	5년
결재일자	2008.12.18.
공개여부	공개
방침번호	상수도사업본부장 방침 제(682)호

담당자		배수과장	급수부장	부본부장		상수도사업본부장
협 조
	시설관리부장

‘09년 송배수관정비 조기발주 추진계획

2008. 12.

	상수도사업본부
	급 수 부

‘09년 송배수관정비 조기발주 추진계획

□ ‘09년 조기발주 대상 송배수관 정비공사에 대한 대상사업을 선정하여 조기발주에 차질이 없도록 조치코자 합니다.

Ⅰ   연차별 추진계획

구 분	총 계	기투자 (’96~2008)	2009년	2010년	2011년
연 장(㎞)	484	381	35	34	34
사업비(억원)	6,900	4,753	740	700	707

Ⅱ   ‘09년 예산 집행계획

□ 총 예 산 : 740억원

□ 집행계획

- 전년도 계속사업    : 138억원

- 신규사업(금회시공) : 578억원(감리비 및 기타 15억원 포함)

- 긴급공사 대비 보유 :   24억원

Ⅲ   ‘09년 사업심사

□ 대 상

- 노후된 강관, 주철관 중 400㎜이상 송배수관

- 전식 등으로 누수다발 관로

- 긴급을 요하는 비상관로 등

□ 심사결과

- 사업소 요청 : 88건 1,119억원

- 선정결과    : 44건   563억원

․노후관       : 34건   403억원

․누수다발     :  9건   157억원[누수방지과 통보(7건), 수도사업소(2건)]

․비상관로 부설 :  1건     3억원[여의도 샛강 횡단관로(D=800㎜, L=120m)]

□ 사업소별 현황

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
건수	44	10	3	6	5	6	4	9	1
연장 (km)	43	6,5	1,8	4,9	5.0	6,7	1,7	11,8	4,6
예산액 (억원)	563	112	28	68	60	82	40	138	35

Ⅳ   추진일정

□ 대상 선정결과 사업소 통보         : ‘08. 12. 18

□ 설계서(도면포함) 작성             : ‘09.  1. 20

□ 도면심사(급수부 직원 사업소 방문) : ‘09.  1. 20

□ 계약심사                          : ‘09.  1. 30

□ 발주 및 계약                      : ‘09.  2.

□ 공사착수                          : ‘09.  3.

Ⅴ   행정사항

□ 설계시 본부 직원 사업소 순회 자문으로 공사시 단수계획 최소화 - 도면심사, 설계심사 등

□ 설계 및 현장조사시 시설관리공단 책임감리원 협조토록 조치