문서번호	배수과-121
보존기간	5년
결재일자	2011.01.17.
공개여부	공개
방침번호	부본부장 방침 제(42)호

★주무관		배수과장	급수부장	부본부장
협 조
	경영관리부장
	기획예산과장

‘11년 송.배수관 정비사업 발주계획

2011.1

상수도사업본부

급수부

‘11년 송.배수관정비사업 발주계획

‘11년 송.배수관 정비사업의 공사대상을 선정하여 조기발주에 차질이 없도록 조치코자 합니다.

Ⅰ

사업 및 예산현황

구 분	총 계	기투자 (’96~2010)	2011년	2012년	2013
연 장(㎞)	484	454	20	6	4
사업비(억원)	6,900	6,189.5	403.5(채무60)	195	112

※ 2011년 시의회 의결예산 : 663.5억원(채무60억원 포함)

Ⅱ

‘11년 예산 집행계획

□ 총  예  산 : 663.5억원(채무 60억원 포함)

- 금회 집행 : 463.5억원(채무 60억원 포함)

□ 집행계획(금회)

- 순환 배관망 형성        : 11건  11,480백만원

- 급수체계(배수지) 전환    :  8건   4,015백만원

- 노후관 정비             :  6건  10,290백만원

- 대체급수(뚝도)           :  3건   5,800백만원

- 관로 이중화(비상관로)    :  2건   6,700백만원

- 신규사업(택지개발)       :  2건   1,400백만원

- 전년도 채무부담         :        4,500백만원

- 감리비 및 기타          :        2,165백만원

-        계              :  32건  46,350백만원

Ⅲ

‘11년 사업 심사

□ 대 상

- 무단수 급수체계를 위한 이중화 및 순환배관망 구축사업

- 효과적인 배수지 운용 및 적정 체류시간 조정을 위한 급수체계 전환사업

- 노후된 강관, 주철관 중 400㎜이상으로 적수 및 누수사고가 많은 관로정비

- 뚝도정수센터 고도처리를 위한 대체급수관로 정비

- 신규 택지개발지역의 급수를 위한 관로

□ 심사결과

- 사업소 요청 : 44건  98,616백만원

- 선정결과    : 32건  46,350백만원

□ 사업소별 현황

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	급수부	채무 상환등
건수	32	4	8	4	2	3	2	5	3	1	-
연장 (km)	29.03	2.24	7.31	5.68	3.32	2.66	1.97	2.75	3.1	0.5	-
예산액 (백만원)	46,350	3,610	9,245	7,030	3,850	2,300	2,100	2,680	2,870	6,000	6,665

Ⅳ

추진일정

□ 대상 선정결과 사업소 통보         : ‘11.  1. 17

□ 도면심사                         : ‘11.  1. 28

□ 계약심사                         : ‘11.  2.

□ 발주 및 계약                     : ‘11.  2.

□ 공사착수                         : ‘11.  3.

Ⅴ

행정사항

□ 본부에서 시행하는 올림픽대로 비상관로 공사를 제외하고 공사 담당자가 설계 및 발주 시행

□ 공사 설계시 본부 직원 사업소 순회방문 심사

- 도면심사, 설계심사 등

□ 상수도 사업본부 조기발주 계획에 맞추어 발주 시행