문서번호	배수과-101347
결재일자	2012.1.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	배수과장	급수부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
협 조
	경영관리부장
	기획예산과장
	주무관

‘12년 송.배수관 정비사업 계획

2011. 12.

상수도사업본부

급   수   부

‘12년 송.배수관정비 사업계획

누수 다발관로 및 녹발생으로 적수발생의 원인이 되는 노후 송.배수관을

개량하고, 뉴타운, 재개발 등으로 인한 신규 급수 수요를 위한 공급관로 부설

등 ‘12년 송.배수관정비 사업계획을 수립 추진하여 안정급수를 도모코자 함.

Ⅰ

사업 및 예산현황

구 분	총 계	기투자 (’96~2011)	2012년	2013년 이후
연 장(㎞)	560	474	40	46
사업비(억원)	8,100	6,593	700	807

Ⅱ

‘12년 예산 집행계획

□ 총  예  산 : 700억원

□ 집행계획

- 관 노후에 따른 누수다발  : 21건  30,850백만원

- 배수지건설 관련 관망형성 :  3건   3,350백만원

- 관로 이중화(비상관로)     :   3건  11,350백만원(올림픽대로 비상관로 포함)

- 대체급수(구의, 뚝도)노후관 :  4건  10,900백만원

- 신규사업(택지개발)       :  5건   6,050백만원

- 전년도 채무부담         :        2,500백만원

- 실시설계 용역비         :        2,000백만원

- 감리비 및 기타          :        1,800백만원

- 예비비                 :        1,200백만원

계               :  36건  70,000백만원

Ⅲ

‘12년 사업 심사

□ 심사대상

- 노후된 강관, 회주철관 중 400㎜이상으로 적수 및 누수사고가 많은 관로정비

- 무단수 급수체계를 위한 이중화 및 순환배관망 구축사업

- 효과적인 배수지 운용 및 적정 체류시간 조정을 위한 급수체계 전환사업

- 구의, 뚝도정수센터 고도처리를 위한 대체급수관로 정비

- 신규 택지개발지역( 뉴타운, 재개발 등)의 급수를 위한 관로

□ 심사결과

- 사업소 요청 : 65건  167,514백만원

- 선정결과    : 36건  70,000백만원

□ 사업소별 현황

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	급수부	채무 상환등
건수	36	4	5	6	3	3	4	5	5	1	-
연장 (km)	43.71	4.03	7.01	8.83	3.31	2.75	3.90	5.76	7.62	0.5	-
예산액 (백만원)	70,000	5,900	11,800	14,600	4,550	3,650	4,500	5,750	6,250	5,500	7,500

Ⅳ

추진일정

□ 대상 선정결과 사업소 통보         : ‘12.  1.

□ 설계용역 발주 및 준공             : ‘12.  1. ~ 3

□ 계약심사                         : ‘12.  4.

□ 발주 및 계약                     : ‘12.  4. ~ 5

□ 공사착수                         : ‘12.  5.