오류1배수분구 하수관로 종합정비

팀  장 : 심 형 보(☎ 2133-3794)

담당자 : 신 중 선(☎ 2133-3795)

□ 사업부서 : 구로구 치수과

□ 사업개요

○ 위    치 : 구로구 개봉2동, 오류1동, 오류2동 일대(206.9ha)

○ 규    모 : 관로정비 총연장 40.7㎞ 중 20.5㎞ (’14년 2.5km)

○ 총사업비 : 27,493백만원 (14년 5,000백만원, 시설비 : 4,730, 감리비 : 270)

○ 사업기간 : 2012. 5월 ~ 2017. 12월

□ 추진현황 및 향후계획

○ ′94.06 ~ ′95.11 : 서울시 하수관거 조사 및 하수정비 기본설계(안양천 배수구역)

○ ′10.03 ~ ′11.06 : 실시설계용역시행

○ ′12.05 ~ ′13.12 : 1~2차 공사시행

○ ′14.01 ~ ′14.12 : 3차 공사시행

○ ′15.01 ~ ′17.12 : 잔여물량 공사 시행 (장기계속공사 시행)

□ 예산배정계획

(단위 : 천원)

예산과목		소계	기배정액	배정요구액	배정잔액	산 출 내 역
소계		5,000,000	-	5,000,000	-
시설비	설계비	-	-	-	-
	공사비	4,730,000	-	4,730,000	-	∘ 하수관 개량 (금회) 2,494m×1,750천원=4,713,660 ∘ 기타 1식×16백만원=16,340
감리비		270,000	-	270,000	-	∘ 전면책임감리 (L=2,494m)

□ 예산 배정요구 사유

○ 노후 불량 하수관거를 정비하여 수해예방 및 하수악취 발생 해소

○ 원활한 배수체계 확립으로 쾌적한 도시환경 구축

○ 하수관로 정비에 필요한 사업비를 재배정하여 사업이 원활히 추진되도록 조치