(1)′14. 00월 하수관거 종합정비사업 추진현황 (00 배수분구)

(추진기간 : ‘14.00.00 ～ 00.00 )

사 업 개 요

추 진 현 황

□ 공사개요

○ 위    치 : ΟΟ구 ΟΟ동, ΟΟ동 일대

○ 규    모 : 하수관정비 총연장 : L = 34.1km

(기시행 23.4km, 금차 3.3㎞, 장래 7.4㎞)

○ 사업기간 : ′08.11.05 ～ ′16.12.31 (금차 : ′14.00.00 ～ ′14.00.00)

○ 블록 및 공구수 : 5개 블록, 5개 공구

- 완료 : 1～3공구, 시행중 : 4~5공구

○ 총사업비 : 58,086백만원

(단위 : 백만원)

구 분		계	기투자	2014년	장래계획
합 계		58,086	36,046	5,000	17,040
시설비	설계비	1,423	1,423	-	-
	공사비	42,072	28,024	3,699	10,349
	관급비	7,257	3,964	889	2,404
	이설비(기타)	5,006	1,083	162	3,761
감 리 비		2,328	1,552	250	526

□ 감리용역

○ 용 역 사 : ㈜ΟΟ(50%) + (주)ΟΟ(50%)

○ 용역기간 : ′08.11.11 ～ ′15.12.31

○ 계약금액 : 총 2,328백만원(금차 250백만원, 누계 1,802백만원)

□ 공사추진실적

○ 총차분

(단위 : m)

계획연장 Ⓐ	기시행 Ⓑ	금차분누계 Ⓒ	실적누계 Ⓓ=Ⓑ+Ⓒ	공정율 Ⓓ÷Ⓐ
34,100	23,400	3,330	26,730	78.3%

○ 금차분 (′14년도)

정비유형		계획연장	전월까지	금월실적	실적누계	공정율
합 계		3,330	3,218	112	3,330	100.0%
통수능부족		729	729	0	729	100.0%
유속미달		773	734	39	773	100.0%
역 경 사		421	421	0	421	100.0%
노후 불량	굴 착	1,064	1,064	0	1,064	100.0%
	비굴착	343	270	73	343	100.0%
신설 등

※ 기타공사 추진실적

구 분		계획량	전월까지	금월실적	실적누계	공정율
암거 보수보강	전체보수(m)
	부분보수(㎡)
시민 친화형	저소음커터기(m)	15,971	13,703	2,268	15,971	100.0%
	경량복공가시설(m)
하수관거공사구간 보도블록 포장(a)

□ 예산집행현황(′14년도)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	설계비	공사비	관급비	이설비(기타)	감리비
예산액	5,000	-	3,699	889	162	250
지출액	5,000		3,699	889	162	250
집행율	67.1%		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

문제점 및 특이사항

□ 문 제 점

-

□ 특이사항

-