면목1배수분구 하수관로 종합정비사업

팀  장 : 심 형 보(☎ 2133-3794)

담당자 : 배 원 영(☎ 2133-3796)

□ 사업부서 : 중랑구청 안전치수과

□ 사업개요

○ 위    치 : 중랑구 면목2, 5동, 중화1, 2동, 상봉1, 2동 일대(155.01ha)

○ 규    모 : 관로정비 총연장 121.2km 중 55.8km (‘14년 10.8km)

○ 총사업비 : 54,897백만원

(14년 7,000백만원, 시설비 : 6,670, 감리비 : 330)

○ 사업기간 : 2008. 12월 ~ 2016. 12월

□ 추진현황 및 향후 계획

○ ′97.12         : 서울시 하수관로 조사 및 하수정비 기본설계

○ ′07.06 ~ ′09.12 : 실시설계용역시행

○ ′08.12 ~ ′13.12 : 1~6차 공사시행

○ ′14.01 ~ ′14.12 : 7차 공사시행

○ ′15.01 ~ ′16.12 : 잔여물량 공사 시행 (장기계속공사 시행)

□ 예산배정계획

(단위 : 천원)

예산과목		소계	기배정액	배정요구액	배정잔액	산 출 내 역
소계		7,000,000		7,000,000	-
시설비	설계비			-	-
	공사비	6,670,000		6,670,000	-	∘ 하수관 개량 (금회) 10.8km×600,000원=6,480,000 ∘ 기타1식 ×190백만원= 190,000
감리비		330,000		330,000	-	∘ 전면책임감리 (L=10.8km)

□ 배정사유

○ 노후 불량 하수관로를 정비하여 수해예방 및 하수악취 발생 해소

○ 원활한 배수체계 확립으로 쾌적한 도시환경 구축

○ 하수관로 정비에 필요한 사업비를 재배정하여 사업이 원활히 추진되도록 조치

□ 검토의견

○ 하수관로 정비에 필요한 사업비를 재배정하여 사업이 원활히 추진되도록 조치